“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경 계약 의뢰

우리시에서 시행중인 ‘제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계용역’에 대하여 다음과 같이 계약금액을 조정(정산)하여 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 기본설계

2. 회 계 명 : 교통사업특별회계

3. 계약기간 : 2014.12.31  ~ 2017.1.31(2차 : 2015.4.30. ~ 2017.1.31.)

4. 계 약 자 : ㈜유신 외 2개사

5. 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
계약 금액	전체	1,106,580,000	1,075,777,000	감 30,803,000	지반조사 및 자문비 정산
	2차	606,580,000	575,977,000	감 30,603,000

6. 예산과목

- 도로건설, 간선도로망확충, 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

따로 붙임 : 1. 계약금액 조정 보고(방침서) 1부.

2. 변경(정산) 내역서(전체) 1부.

3. 변경(정산) 내역서(2차) 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	도로계획과장
전문관	정용훈		도로정책팀장	이승석		도로계획과장	01/20 하종현
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로계획과-1078	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과	/
전화	02)2133-8065	/전송	02)2133-0763	/	hoon0916@seoul.go.kr	/	대시민공개