문서번호	토목부-1549
결재일자	2017.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
임준우		명경출	01/20 김영수
협조
	주무관		박운용

폐기물처리용역 준공기한 연기 검토보고

【광복교∼안양교 도로확장공사 폐기물처리용역(1차)】

2017. 01.

도시기반시설본부

(토 목 부)

폐기물처리용역 준공기한 연기 검토보고

【광복교~안양교 도로확장공사 폐기물처리용역(1차)】

본 폐기물처리용역의 선행공정인 토목공사(1차)가 하천점용허가 지연으로 공기 연장됨에 따라 토목공사 준공기한에 맞춰 폐기물처리용역(1차) 준공기한을 연기코자 함.

용역개요

❍ 용 역 명 : 광복교~안양교 도로확장공사 폐기물처리용역

❍ 용역규모 : 폐콘크리트 15,262톤, 폐아스콘 5,891톤

❍ 용역기간 : `16.11.11. ~ `19.09.12.(전체)

`16.11.11. ~ `17.01.25.(1차)

❍ 용 역 비 : 446,986천원 (1차 24,000천원)

❍ 용 역 사 : 우광개발(주)

검토내용

❍ 건설폐기물처리용역 공정은 토목공사 진행에 따라 발생되는 건설폐기물

처리·운반하는 과정으로서, 토목공사의 공기에 맞춰 진행되어야 함.

❍ 본 공사 토목공사(1차)가 서울지방국토관리청의 안양천 하천점용협의

지연으로 1차공사 준공기한을 연기(`17.1.25.→`17.3.24.)할 예정으로,

1차공사 준공기한에 맞춰 폐기물처리용역의 준공기한을 연기하여 사업추진에

만전을 기하고자 함.

폐기물처리용역 1차 준공기한 변경 (2개월 연기)

❍ `17.1.25. →`17.3.24.

조치계획

❍ 위 검토내용과 같이 토목공사(1차)의 공기에 맞춰 폐기물 처리용역(1차)의 준공기한을 연기하고자 함.

붙  임 : 1. 건설사업관리단 검토의견서 1부.

2. 용역사 준공기한 연기요청 공문 1부.

3. 시설공사 준공기한 연기보고서 1부.  끝.