문서번호	토목부-5585
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장
시희식	성선주	전결 03/24 노우성
협 조

준공기한 연기보고

(강남순환도로4공구 건설폐기물처리 용역)

2014. 3.

서울특별시도시기반시설본부

(토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 ■	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 ■ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 갈등발생 ■ 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(		)		무 □
	●	기업	:	유 ■	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(		)		무 □

준공기한 연기보고

(강남순환도로4공구 건설폐기물처리 용역)

1		사업개요

◦  용역명 : 강남순환도시고속도로4공구건설공사 건설폐기물처리용역

◦  위  치 : 금천구 독산동 ~ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

◦  규  모 : 폐콘크리트 28,336톤, 폐아스콘 9,140톤

◦  사업기간 : 2010.3.8. ~ 2014. 5. 31

◦  계약금액 : 1,156백만원(`14년 예산 300백만원)

◦   용역업체 : ㈜ 방태 김용남(현장대리인 이동훈)

□ 강남순환도시고속도로4공구 건설공사

◦  위  치 : 금천구 독산동 ~ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

◦  규  모 : 폭 4～10차로, 연장 2.5Km

- 지하차도 760m, 본선교량 820m, 토공도로 900m

◦  사업기간 : 2001.12.29. ~ 2014. 5. 16  ※ 2년 공기연장

◦  총사업비 :330,218백만원 (`14년 예산 427억원)

◦   시공사 : 임광토건/서영ENG

2		준공기한 연기

◦  변경내역 : 용역기간 연장 2년 ('14,5 → '16,5)

(단위 :　백만원)

구분	강남순환 4공구 전면책임감리 용역			비고
	당 초	변 경	증 .감
총용역비	1,156	1,156	-
용역비	1,156	1,156	-
용역기간	2010. 3. 8.~ 2014. 5. 31	2010. 3. 8. ~ 2016. 5. 31	2년연기

◦ 지체상금 : 미부과

3		연기사유

◦  강남순환도시고속도로4공구 건설공사 공기연기

붙임 : 1. 강남순환도로4공구 건설공사 준공기한 연기 보고서(방침서) 1부.

2. 강남순환도로4공구 책임감리단 준공기한 검토 요청서 1부.  끝.