문서번호	설비부-1165
결재일자	2017.1.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		代이호기	01/23 권오식
협조

『서울역 7017 프로젝트 전기공사』

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

도시기반시설본부

(설   비   부)

『서울역 7017 프로젝트 전기공사』

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「서울역 7017 프로젝트 전기공사」와 관련 서울역 발전 기획단 요청사항 및 현장여건 변경에 따른 설계변경에 대한 검토 결과를 보고 드림.

1		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서울역 7017 프로젝트 전기공사

□ 위    치 : 중구 남대문로5가(퇴계로) ~ 만리동1가(만리재길)

□ 공사규모 : 수전용량 500kVA, 비상발전기 130kW, 통합폴 111EA. 등

□ 사업기간 : 총차 ′16.05.02.~′17.06.01.(1차 ′16.05.02.~′17.02.01.)

□ 계약금액 : 총차 2,257,874천원(1차 500,000천원)

□ 계약업체 : 대명전력㈜   대표 백창욱

2		관련근거

□  서울역(건) 제17-50호(2017.01.20.)

전기공사 설계변경 소위원회 지적사항 조치결과 및 설계변경서 제출.

3		설계변경 내용

□ 계약금액 변경내용                                   (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감액	비 고
총차	2,258,874	2,198,519	감)59,355	2차공사에서 감액처리
1차	500,000	474,858	감)25,142	4대 보험료 등 정산

※ 공사기간 변경없음.

□ 설계변경 소위원회 자문결과                        (단위 : 천원)

구 분	심의요청금액	심의결과 조정금액	증·감액
전기공사	2,200,238	2,198,519	감)1,716

□ 설계변경 사유

○ 서울역 발전 기획단 요청

- 휠체어 충전기 2대 추가

- 화분등기구 타입 변경(블럭조명 → 띠조명)

- 만리동 여행자 카페 신규 설치 등

○ 현장 여건 변경

- 전선관 HI-PVC→CD (시공 편위성)

- 건축 구조 변경에 의한 배관 위치 변경 등

□ 설계변경 세부 내용

연번	구 분	주요변경내용	당초금액	변경금액	증, 감
1	옥외 전기	휠체어충전기 2대추가 전선관HI-PVC에서 CD배관으로 변경 신규 옥외태양광설비공사	712,299	700,500	11,799 (감)
2	만리동	전기실 위치변경에 따른 물량변경 여행자카페 추가	73,531	98,699	25,168 (증)
3	편의 시설 등	건축구조변경에 의한 물량변경 전선관HI-PVC에서 CD로 변경 등	229,031	222,116	6,915 (감)
4	경관 조명	등기구 타입변경 (벽부→라인조명) 전선관 및 배선물량 감소	592,824	467,529	125,295 (감)
5	관수 제어 등	조경 요청에 의한 신규설치공사 월드컵 대교 시험 시공	-	33,969	33,969 (증)
6	제경비	1차공사분 4대 보험료등 정산	650,186	620,971	29,215 (감)
7	물가 변동	제1회 물가변동		54,735	54,735 (증)
합계			2,257,871	2,198,519	59,355 (감)

□ 건설사업관리 기술단 검토 의견

○ 상기와 같이 시공사에서 제출한 설계변경(총차, 1차)에 대한 검토 결과 서울역 발전 기획단 요청사항 및 현장여건 변경사항으로 설계서 및 물가변동에 의한 계약금액 조정, 1차 공사분 보험료 정산 등이 관련 규정에 따라 적합하게 작성되어 설계변경함이 타당하다고 판단함.

4		보고자 의견

○ 서울역 발전 기획단 요청사항 및 현장여건 변경 등으로 발생한 계약금액 변경사항은 건설사업관리 기술단 의견이 적합한 것으로 판단 됨.

○ 재무과에 계약금액(총차, 1차) 변경 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리원 설계변경 보고 1부. 끝.