문서번호	설비부-1146
결재일자	2017.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
백남진		임현근	01/23 권오식
협조

『어린이병원삼성발달센터증축 전기·통신공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

도시기반시설본부

(설비부)

관급자재 납품기한 연장 검토보고

<어린이병원 삼성발달센터 증축 통신공사>

「어린이병원 삼성발달센터 통신공사」의 관급자재(주차관제설비 및 CCTV설비)에 대하여 납품기한 연장하고자 보고 드림.

1		관련근거

□ 어린이병원 통신공사 관급자재 납품연기요청 : 서도기 통 17(2017. 01. 20.)

- CCTV납품연기 요청 : 영국17(서) 2018. 01. 18

- 주차관제설비 납품연기 요청 : 2017.0120-01호 2018.01.20.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 서울시어린이병원삼성발달센터증축 통신공사

□ 공사규모 : 지하2층/지상5층 연면적11,950㎡ 통신설비 1식

□ 공사기간 : 2015. 04. 20 ～ 2017. 02. 19

□ 공 사 비 : 860,839,640원(도급비490,955,000원, 관급비369,884,640원)

□ 시 공 사 : 유복전기(주) 대표 유정식

□ 감 리 사 : (주)영화키스톤

3		검토내용

□ 관급자 계약 현황

품 명 (납품요구번호)	계약자	수 량	계약금액	납품기한	비 고
주차관제설비 (12-16-2-15686-00)	㈜토마토전자	1식	57,003,800	2017.01.29.
CCTV설비 (12-16-2-16259-00)	㈜영국전자	1식	250,276,000	2017.01.31.

□ 납품기한 연장 사유

- 납품기한 연장 사유 : 선행공정 지연에 따른 납품(설치)시기 미도래

□ 관급자재 납품기한 연기

품명	납품요구번호	계약자	계약금액	납품기한		비 고
				당초	변경
주차관제설 비	12162-15686-00	(주)토마토전자	57,003,800원	2017.01.29.	2017.05.30
CCTV 설 비	12162-16259-00	㈜영국전자	250,276,000원	2017.01.31.	2017.05.30.

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		조치계획

□ 선행공정(건축) 지연에 따라 납품(설치)시기가 미도래하고

□ 건설사업관리기술단 검토보고 한 내용이 적정하다고 판단되어 현장여건에 맞추어 관급자재 납품기한을 연장하고자 함

따로 붙임 :  관급자재 납품기한 연장 관련 문서  각 1부. 끝.