문서번호	급수운영과-2184
결재일자	2017.1.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
주은선	유명은	김정수		01/24 이인걸
협 조	주무관		정수용
	주무관		손현정
	주무관		이용호
	주무관		여수현
	주무관		김효경

2017년

소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

2017.  1.

강서수도사업소

(급수운영과)

2017년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 단수 또는 정체없이 공급하기 위한 2017년 소블록 배급수관망 개선사업에 대한 추진계획을 수립 시행하고자 함

※ 관련근거 : 2017년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획

누수방지과-407호, ’17. 1. 11)

□ 현  황

○ 사 업 명 : 2017년 소블록 배급수관망 개선사업

○ 사 업 비 : 231백만원

○ 정비대상 : 단일배관 이중화 1개소, 단절관정비 7개소, 397m

○ 사업목적

- 단일배관 이중화로 무단수 급수체계 구축

- 단절 구간을 순환관망으로 형성하여 깨끗한 아리수 공급

<단일배관 이중화>                            <단절관 순환관망>

	➡

□ 추진계획

○ 추진실적 및 계획

구분	총계	추진실적				추진계획
		소계	’14년	’15년	’16년	소계	’17년	’18년 이후
사업비 (백만원)	2.242	439	131	1	307	1,803	231	1,572
대상(개소)	64	11	7	2	2	53	8	45
연장(㎞)	3.36	0.7	0.2	0.1	0.4	2.66	0.4	2.26

○ 2017년 추진계획

- 소블록 배급수관망 개선 : 8개소(397m) 231백만원

∙ 단일배관 이중화 : 1개소, 9백만원

∙ 단절관 순환관망 : 7개소(397m), 222백만원

- 세부 추진내역

사업명	위치	공사개요	사업비 (천원)	공사기간	담당자
계		397	230,600
단일배관 이중화 (1건)	오류2동 145-50,90	중간밸브 D100㎜ ×2개소	9,000	‘17.3월~9월	김효경 (시설9)
단절관 순환관망 (7건)	발산1동 722-16	D 80㎜, L=80m	32,000	‘17.3월~9월	정수용 (시설7)
	염창동 289	D 150㎜, L= 140m	84,000	‘17.3월~9월	손현정 (시설7)
	염창동 56-1
	구로2동 414-25	D 80㎜, L= 2m	3,600	‘17.3월~9월	이용호 (시설7)
	구로4동 140-33	D 100㎜, L= 2m	4,000	‘17.3월~9월
	목2동 538-10~18	D 150㎜, L= 55m	33,000	‘17.3월~9월	여수현 (시설7)
	목4동 764-4	D 100㎜, L= 58m	29,000	‘17.3월~9월
	목5동 908-32~909-9	D 150㎜, L= 60m	36,000	‘17.3월~9월

- 추진방법 : 연간단가업체 작업지시하여 정비(공사건별 도급액 20백만원 이하)

- 사업기간 : 2017. 3. ~ 9.

□ 행정사항

○ 사업 추진계획 수립 보고서 제출(본부 누수방지과)

○ 담당자는 단절관 순환관망 공사 추진에 차질이 없도록 제반사항 조치 및 가급적 2017년 상반기 이전 정비 완료

붙임 : 단절관 순환관망 연차별 정비 추진대상. 끝.