“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	지체상금 면제 요청

1. 교통운영과-22718(2016.11.25.)호 및 계약번호 26161*******11호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진한『서울역버스환승센터 시설물 개선을 위한 전기공사』에 대하여 아래와 같이 지체상금 면제를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 서울역버스환승센터 시설물 개선을 위한 전기공사

나. 계약업체 : ㈜삼호전기산업(대표 : 김칠복)

다. 계약금액 : 47,110,990원

라. 계약일자 : 2016.12.15

마. 준공기한 : 2017.01.13

바. 지체기한 : 2017.01.14.∼2017.01.23

사. 지체상금 면제사유

- 위 계약건은 서울역 버스환승센터에 설치되어 있는 시설물 개선을 위한 전기공사로 준공기한 내 공사를 마무리하였으나, 해당 시설물 개선공사와의 연계 작업으로 준공조서 제출이 지연되었기에「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제90조에 의거 지체상금을 면제토록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	교통운영과장
주무관	이민호		BRT팀장	박동욱		교통운영과장	01/25 강진동
협조자
시행	교통운영과-1578	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02)2133-2476	/전송	02)2133-1053	/		/	대시민공개