의원 요구 자료 제출

시 행	동남권사업단-933
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		공간계획팀장	동남권계획반장	동남권사업단장	지역발전본부장	결재
우인식		오장환	강성욱	최경주	01/25 정수용
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 25번, 이종배의원, 교육문화체육관광위원회)

1. 의원님께서 요구하신 자료를 따로붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이종배의원(교육문화체육관광위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 25번

종합운동장 리모델링사업 현황 혹은 계획

□  의원님이 요구하신 사항에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

잠실종합운동장 리모델링 사업 계획

□ 88올림픽 개최지의 상징성 및 역사적 가치를 고려한 기능 및 공간 복합화

□ 시설 노후화로 관리비용 증가에 따른 보수·보강, 이용활성화를 위한 정비

□ 사업개요

○ 위    치 : 송파구 올림픽로 25 (잠실종합운동장 내)

○ 사 업 비 : 약 2,800억원 (공공기여 활용)

○ 사업규모 : 주경기장 리모델링 (134,695㎡), 보조경기장 이전  (41,150㎡), 유스호스텔 신축(15,000㎡)

○ 사업기간 : '15.11 ~ '23. 5

○ 주요내용 : 역사적 상징성을 고려 원형유지하면서 복합화

- 주경기장은 종합경기장 기능 유지하되 일상적·적극적 활용이 가능토록 복합화

- 보조경기장은 이전 신축 현대화

- 유스호스텔은 한류 k-pop 관람객, 배낭여행 및 지방 운동선수 숙소로 활용

□ 추진경위

○ 잠실운동장 일대 시민‧전문가 의견 수렴( '14.11~'15. 9)

- 잠실종합운동장 일대 도시재생 구상 국제공모(‘15.4~9):우수작3, 가작5 작품

- 시민 아이디어 공모('15.1~5): 127건 중 18건 선정, 보행연계 등

- 천만 상상 테마 제안('14.11~12) : : 47건 접수, 스포츠, 공원활용 등

○ 올림픽주경기장 리모델링 기본구상 및 타당성 조사('15.11~'16.5)

<주경기장 위치도>	<리모델링 단면 조감도>	<조 감 도>

○ 올림픽주경기장 리모델링 기본계획 수립중('16.7~'17.4)

□ 향후계획

○ '17. 4  : 기본계획 수립 완료

○ '17. 5~ 12  : 국제 설계공모

○ '18. 1~ '19. 11  : 기본 및 실시설계

※ '19. 10 : 제100회 전국체전

○ '19. 12~ '23. 5  : 공사시행

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (동남권계획반)	담당사무관	오 장 환
	☎2133-8236	주무관	우 인 식
	작 성 일 : 2017.01.25