문서번호	대외협력과-709
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	대외협력과장	경영관리부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
현경선	백종문	정진일	구아미		01/25 한국영
협 조

2017년「수도사업 해외진출」추진계획

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 목   차 -

Ⅰ. 추진방향	1

Ⅱ. 2016년 추진실적	1

Ⅲ. 2017년 추진계획	3

1. 기존사업 추진	3

2. 신규사업 추진	7

3. 수도사업 해외진출 기반조성	9

Ⅳ. 행정사항	12

[붙  임]

1. 수도사업 해외진출 사업현황	13

2. 베트남지역 수도시설 개선사업 대상 도시 현황	14

3. 유관기관 지원사업, 타당성 조사 참여 절차 1부	17

4. 유관기관 현황 1부	19

5. 수도사업 해외진출 현황도	별첨

2017년 수도사업 해외진출 추진계획

수도사업 해외진출을 내실있게 추진하기 위한「2017년 수도사업 해외진출 추진계획」을 수립하여 시행하고자 함

Ⅰ		추진방향

□ 민간기업과 협력하여 해외 수도사업 공동 진출

-  우 리 시 : 상수도사업 실적 제공 및 수도시설 운영․관리

-  민간기업 : 재원조달, 마케팅 및 인프라 건설

□ 저개발 국가 수도시설 개선사업으로 해외진출 교두보 마련

□ 세계 최고수준의 서울시 상수도기술 해외도시 전파

Ⅱ		2016년 추진실적

□ 브루나이 PMB섬 교량, 수도 등. 인프라 개발 컨설팅 사업 추진

○ 발주금액 : 135억원(서울시 지분율 3.6%)

○ 사업기간 : 2012년 ~ 2020년

○ 참여기업 : 평화엔지니어링, 도로공사, ㈜삼안, OMC(현지기업)

○  추진사항

- 서울시 역할 수행 : 수도분야 공사 감리업무

․감리인력 파견 : 시설 6급 정연준(’16.4~’18.4)

- 사업참여에 따른 수익금 잡수입 처리(’16.7.28)

․1차 기성금 : 31백만원

□ 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 실시(2단계 라메르세드지역, 1년차)

○ 사 업 비 : 293백만원(서울시 대외협력기금)

○ 수행업체 : ㈜서영엔지니어링(PMC 방식, 일반경쟁)

○ 사업내용

- 취수시설 구조물 설치(Q=3,450톤/일) 1식

- 도수관로 부설(D=315mm, L=1,216km)

□ 베트남지역 도시대상 식수시설 개선사업 실시

○ 대상지역 : 베트남 도시 후에성

○ 사 업 비 : 84,813천원(본부예산)

○ 수행업체 : 테크윈시스템(조달청을 통한 제작구매 설치)

○ 사업내용 : 온라인 수질 다항목연속자동측정장치 제작 구매 설치로 수질개선

□ 수도사업 해외진출 기반조성 사업 추진

○ 아리수 국제화 포럼 운영(포럼위원(학계,민간기업 등) 26명)

- 본회의 개최(2회), 주제발표 및 해외진출을 위한 민관협력방안 등 논의

○「수도사업 해외진출 민・관협의체」운영

- 전체회의(2회), 분야별 소위원회(5회), 임원회의(3회)

- 5개분야 37개 기업으로 구성, 해외진출을 위한 정보교류, 사업공동발굴 추진 등

○ 외국도시 수도관계자 초청연수 실시

- 1차(’16.5.15~21) : 베트남, 페루, 네팔, 필리핀 수도관계자 15명

- 2차(’16.9.25~10.1) : 중국 5개성 7개도시 수도관계자 12명

- 3차(’16.11.13~20) : 멕시코, 에콰도르 등 7개국 수도관계자 13명

○ 상수도 전문기술 인력 파견

- 대상도시 : 베트남 닌빈, 하이즈엉시

- 역    할 : 수도시설에 대한 컨설팅, 홍보, 기술자문 실시 등

- 파견인원/기간 : 분야별 전문가 5명/ 10.24~28(5일)

○ 해외 수도 사업 대상 도시 아리수 홍보 마케팅 추진

- 주한 재외공관 방문 상수도 해외사업 홍보 : 그리스, 조지아 등 10개 대사관

․서울시 상수도 사업본부 해외수도사업 소개 및 홍보, 협력관계 구축

․주한 재외공관 국가 상수도 현황 및 사업계획 파악

- 상수도 해외사업 외국어 홍보 브로슈어 제작·배부

․발간언어 : 5종(국어, 영어, 중어, 베트남어, 스페인어)

․발간부수/형태 : 4,000부/브로슈어, 16페이지

․내    용 : 서울시 상수도 우수성, 상수도 해외사업, 민·관협의체 소개 등

Ⅲ		2017년 추진계획

1. 기존사업 추진

1-1. 브루나이 PMB섬 인프라 개발 컨설팅 사업

□ 사업개요

○ 사업내용 : PMB섬의 교량, 도로, 수도등 인프라 개발에 대한 컨설팅

- 교량 2.8km, 접근도로 5.0km 건설

- 식수 400m³/일, 공업용수 2,000m³/일 공급

○ 발 주 처 : 브루나이 경제개발청

○ 발주금액 : 약 135억원(서울시 지분율 3.6%)

※ 전체 사업비 : 약 2,354억원(시공비:2,219억원, 컨설팅비:135억원)

○ 사업기간 : 2012년 ~ 2020년

○ 추진방법 : 민간기업과 컨소시엄 구성

- 컨소시엄 참여기업 : 평화엔지니어링, 도로공사, ㈜삼안, OMC, 서울시

- 서울시 역할 : ㈜삼안과 함께 수도분야 감리 및 운영업무 수행

	<브루나이 PMB섬>

□ 추진경과

○ ’12.1. : ㈜삼안의 요청에 의해 컨소시엄 구성

○ ’12.1. : 국제입찰 참여

○ ’12.8. : 사업 수주(계약체결)

○ ’12.8. ~ ’13.12.: 현지조사, 기본설계, 입찰안내서 작성

○ ’14.1. ~  : 시공사 선정 입찰 공고

○ ’15.3. : 시공사 결정(중국 China Harbour)

○ ’15.12.: 파견인력 선정(토목 6, 정연준)

○ ’16.4. : 상수도 감리인력 파견

※ 감리인력 파견 개요

□파견기간 : 2016.4~2018.4월(24개월)

□파 견 지 : 브루나이 PMB섬 인프라 개발 현장

□파견대상 : 정연준(토목 6)

□ 2017년 추진계획

○ 상수도 시공감리 업무 수행 : ’17.1월 ~ 12월

○ 브루나이 사업지원 및 관리 : J/V간 전체 현안회의 실시(격월/수시)

○ 사업참여에 따른 수익금 처리 : 수입발생 즉시 잡수입처리

※ 2차 기성금 92백만원 잡수입 처리완료(’17.1.6)

1-2. 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(ODA)

□ 사업개요

○  사업내용 : 산라몬․라메르세드․피차나키 지역 수도시설 개선

○ 사업기간 : 2013~2018년(3단계 구분 시행)

- 1단계(’13∼’15년) : 산라몬 취수시설 및 도수관로 개량, 정수장건설, 상수도관망 정비 등

- 2단계(’15∼’17년) : 라메르세드 취수 및 정수시설 개량, 상수도관망 정비 등

-  3단계(’18년) 사업  :  피차나키 취수장 이전 및 정수시설 개량, 상수도관망 정비 등

○ 총사업비 : 약 2,298백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	공 사 비(백만원)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
예산액	2,298	318	320	294	293	779	294
지역별		산라몬	산라몬	산라몬	라메르세드	라메르세드	피차나키

○ 수행방법 : PMC용역(계약업체 책임하에 사업의 전 과정을 수행)

	< PMC(Project Management Consultancy)>
□프로젝트의 기획, 설계, 시공업체 선정, 시공, 유지관리 등에 대한 사업 전체를 관리 수행하고, 사업 완료 후 발주처에 사업 성과품을 제출하는 용역 계약 형태 □사업 추진이 어려운 KOICA 해외사업 발주시 주로 적용하는 방식임

□ 2017년 추진계획

○  사업내용 : 라메르세드지역 수도시설 개선(2단계 2년차)

- 정수시설 확장 및 개량

□약품 투입시설 개량(정량펌프설치), 정수장 노후 밸브 교체(12개소), 급속여과지 하부집수장치(유공블록) 및 여과사 교체 등

- 송수관로 개량

□HDPE관 구경 12″, 연장500m

- 산라몬 정수장 펌프장 설치

□펌프 2.08㎥/min 2대, HDPE관 구경 12″, 연장 1,500m

○ 사업기간 : 계약일로부터 ~ 10. 31

○ 사업예산 : 779백만원(대외협력기금)

○  사업방법 : PMC 방식(일반경쟁입찰로 업체 선정)

○  추진일정

- ‘17년 라메르세드지역 수도시설 개선사업 사업 발주 : 1월

- 개선사업 업체선정, 계약 체결 : 2~3월

- 수도시설 개선사업 시행 : 3월~10월

- 사업 현장점검을 위한 담당자 등 전문가 파견 : 4월

□수도사업 착공 후 사업시행 진행 확인 및 업무협의 등

- 찬차마요시 수도시설 개선사업 준공 : 10월

2. 신규사업 추진

2-1. 베트남지역 도시 대상 수도시설 개선사업

급변하는 물 산업 환경변화에 대응하여 해외 수도사업 진출 기반을 마련하기 위해 베트남지역 수도시설 지원사업 시행

□  사업목적

○ 환경시장 성장잠재력이 큰 베트남의 수도시설 개선사업 지원으로 물 문제 해결에 기여하고, 국내 수도관련 기업의 해외진출 기반 마련

□  사업개요

○ 사업금액 : 100,000천원(사업비 : 84,813천원)

○ 사업기간 : '17. 1. 1 ~ 10. 31.

○ 대상지역 : 베트남 도시(껀터시와 협의중)

○ 사업내용

- 정수시설 기술진단을 통한 개선공사

□공정별 성능 평가 기술진단 시행

□여과지 개량, 약품투입장치 개량, 수질측정 장치 설치, 노후된 밸브 교체 중 선택하여 시행

○   사업방법 : 일반경쟁입찰로 업체 선정

□  추진일정

○ 사업 추진을 위한 사전 현지조사 실시 및 사업계획 수립 : 4월

○ 베트남 지역 수도시설 개선사업 사업 발주 및 계약 : 5~8월

○ 식수시설 개선사업 시행 및 준공 : 8~10월

2-2. 유관기관 해외진출 지원사업 참여 추진

전략적인 해외시장 개척을 위해 유관기관에서 실시하는 해외진출 지원사업에 민간기업과 함께 참여함으로써 해외사업 발굴을 촉진하고 해외진출 기회를 마련하고자 함

□ 사업개요

1. 개도국 환경개선 마스터플랜(상수도) 수립 지원사업 참여

○ 사업목적

- 해외진출 대상국의 환경개선 마스터플랜 수립을 지원함으로써 국내 기업들의 현지진출을 위한 우호적인 여건 조성, 협력 채널 구축

○ 주관기관 : 한국환경기술원

○ 사업내용 : 대상지역․분야 기본계획 수립, 협력사업 발굴 및 추진방안 제시

○ 사 업 비 : 국가당 약 7~8억원 지원

○ 사업기간 : 14개월이내

○ 모집시기 : 매년초 사업공고를 통해 사업수행기관 선정

2. 해외사업 타당성조사(상수도) 지원 사업 참여

○ 사업목적

- 해외 유망 플랜트 개발 초기단계에 국내 환경산업체의 참여를 지원함으로써 수익성 높은 해외 환경프로젝트의 수주기회 확대 및 해진출 촉진

○ 주관기관 : 한국환경기술원, 해외건설협회, 한국플랜트산업협회 등

○ 사업비 : 프로젝트당 최대 2억원 지원

구분	중소기업	중견기업	대기업
지원 비율	80%	50%	30%

○ 사업기간 : 사업착수일로부터 최대 12개월

○ 지원대상 :

- 수의계약 또는 공개입찰 참여를 추진 중이거나 예정인 프로젝트중 타당성 조사를 수행할 경우 수주가능성이 현저히 높은 해외환경프로젝트

○ 모집시기 : 매년 초(1~2월) 및 필요시 수시 공고

□ 추진방법 : 민․관협의체 회원과 협업하여 공동 참여 추진

○ 민․관협의체를 통해 참여자 모집, 참여 사업별 MOU체결 추진

○ 대상국가 선정, 참여사별 역할 분담, 사업추진체계 구축 등 마련

※ 대상국가 선정

⇨ 우리시 해외진출대상 지역인 베트남 등 동남아시아 및 남미 위주로 선정

□ 서울시 역할

○ 진출대상 정부와 사업발굴 협의, 교류 등 정책지원, 상수도분야 자문

3. 수도사업 해외진출 기반조성

3-1. 아리수 국제화포럼 운영

□ 구성 : 전문가, 민간기업, 유관기관 등 26명으로 구성

□ 주요기능

○ 수도사업 해외진출을 위한 자문기구 역할

○ 수도사업 관련 정책브레인으로서 민관네트워크 구축

□ 추진일정

○  본회의 개최 : 반기별(4월, 10월)

○ 주요 내용

- 포럼 회원 소속기관간 협력을 통한 해외진출 모델 개발

- 타깃도시 및 사업모델 선정, 추진전략 수립에 관한 사항 자문

3-2. 수도사업 해외진출「민․관협의체」운영

□ 구    성 : 수도관련 37개 민간기업, 본부

□ 구성분야 : 5개분야(컨설팅, 설계, 시공, 수질관리, 기자재)

□ 임원구성 : 공동회장(기업1, 본부1), 분야별 위원장(5), 간사(서울시)

□ 운영내용

○ 해외사업 공동발굴 및 추진, 전략마련, 기술․정보교환

○ 사업참여 공동추진을 위한 해외사업별 MOU체결 등

□ 추진일정

○  전체회의 : 반기별(3월, 9월), 소위원회(분야별, 사업별 수시개최)

○ 주요 내용

- 분야별 사업계획 수립 및 추진방향 논의

- 해외사업 발굴 및 모델 개발, 참여 회원별 역할 분담

- 사업 공동개발을 위한 해외진출 현황 등 정보공유

3-3. 외국 도시 수도관계자 초청 연수실시

□ 대상도시 : 기 진출한 도시나 진출 가능성이 높은 도시

□ 초청대상 : 해당국의 수도정책 결정권자 및 수도기술자

□ 연수내용 : 우수정책 및 기술 소개, 현장견학, 기업과의 교류 등

□ 연수일정 : 총 4회 60명 내외(상수도본부 3회, 인재개발원 1회)

구분	연 수 기 간	연 수 대 상	연 수 운 영
1차	’17. 4. 23. ~ 29.	15명 내외(베트남 수도관계자)	본부, 상하수도협회 위탁
2차	’17. 7. 9. ~ 15.	15명 내외(중국 수도관계자)	본부, 시티넷 협력
3차	’17. 9. 24. ~ 30.	15명 내외(서울시 우호협력 도시)	본부, 상하수도협회 위탁
4차	’17. 10. 15. ~ 21.	15명 내외(서울시 우호협력 도시)	인재개발원 운영

□ 활용방안 : 네트워크를 구축하여 해외 진출시 우호세력으로 활용

3-4. 상수도 전문인력 파견

□ 대상도시 : 베트남 껀터시 등

※ 민간기업과 협력으로 수도사업 해외진출이 가능한 도시중 선정

□ 파 견 자 : 분야별 전문가 5명(해외사업, 토목, 수질, 기계․전기 등)

□ 파견일시 : ’17. 6월

□ 파견기간 : 도시당 4∼5일

□ 파견자 임무

○ 수도시설 및 운영에 대한 컨설팅, 개선방안 건의, 홍보 등

○ 친선도모 ⇒ 네트워크 구축 및 우호세력 확보

○ 해당 도시 진출시 필요한 자료(정보) 수집

3-5. 상수도 해외사업 홍보 추진

□ 사업계획

○ 해외사업 홍보를 위한 상수도 관련 국제 행사 참석

- 해외 물산업 박람회, 워크숍, 포럼 적극 참석, 정책공유 및 홍보 실시

※ Singarpore international water weeks(’18.7월중 개최) 참석 추진 등

○ 상수도 해외진출 설명 소책자 제작(2016년 통계 적용)

- 제작기간 : ’17. 3 ~ 6월

- 종류/수량 : 4종(베트남어, 영어, 중국어, 스페인어)/4,000부

- 규격/분량 : B5, 20페이지 내외

- 용     도 : 우리시 방문 외국도시 대표단 및 해외 진출 대상 도시 등에 배부

○ 수도사업 해외 교류용 전통 기념품 제작․구매

- 구매기간 : ’17. 1. ~ 12.(필요시 수시)

- 종류/수량 : 140개(귀빈용 40, 일반용 100)

- 용     도 : 외국도시 대표 본부방문 및 해외도시 방문 시 활용

○ 주한 재외공관 방문 상수도 해외사업 홍보

- 대상국가 선정

□수도시설 개선이 필요한 저개발 국가, 우리수도 기술에 관심 표명 국가, 신도시 개발 등 수도사업 확대가 예상되는 국가

- 방법 : 본부 홍보책자, 브로셔, 병물 아리수(1박스 증정)를 활용 홍보

- 내용 : 상수도 현황 및 우수기술, 해외사업 소개, 해외사업 사례 등

□ 추진일정

○ 상수도 해외진출 설명 소책자 제작 : ‘17. 3. ~ 6월 중

○ 수도사업 해외 교류용 전통 기념품 제작·구매 : ‘17.1~12월

○ 대사관 방문홍보 실시 : ‘17.1~12월

Ⅳ		행정사항

□ 단위사업별 상세 추진계획은 별도 수립 시행

□ 해외사업 홍보 및 신규사업 발굴 추진은 연중 실시

※ 붙임 : 1. 수도사업 해외진출 사업현황 1부

2. 베트남지역 수도시설 개선사업 대상 도시 현황

3. 유관기관 지원사업 참여 절차 1부

4. 유관기관 타당성조사 참여 절차 1부

5. 유관기관 현황 1부

6. 수도사업 해외진출 현황도 1부. 끝.

붙임1		수도사업 해외진출 사업현황(총 5개국 7개사업)

□ 추진 사업 : 3개국 3개 사업

사업형태	국가명	사 업 명	기 간	총사업비	참여기업
민간기업과 컨소시엄(1건)	브루나이	브루나이 PMP섬 인프라 개발 컨설팅 사업	`12~`20	135억원	평화, 도로공사, 삼안, OMC
저개발국가 지원 (2건)	페루	페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(2단계, 라메르세드지역)	`16~`17	10억원	1년차(서영엔지니어링) 2년차(공개경쟁선발 예정)
	베트남	베트남지역 도시대상 수도시설 개선사업(신규)	`17.1~11	1억원	공개경쟁 선발 예정

□  완료 사업 :  4개국 4개 사업

사업형태	국가명	사 업 명	기 간	총사업비	참여기업	비고
민간기업과 컨소시엄(2건)	인도네시아	인도네시아 자바주 7개지역 정수장 시설 타당성 조사	`14.5~12	76백만원	로스웰워터텍글로컬		수입 : 자문료 167만원
	파푸아뉴기니	파푸아뉴기니 정수장 개량사업 타당성 조사	`14.6~`15.3	140백만원	대우, 도화		수입 : 자문료 466만원
저개발국가 수도시설 개선 (2건)	페루	페루 찬차마요시 수도시설 개선사업(1단계, 산라몬지역)	`13~`15	932백만원	한국종합기술	서울시 대외협력기금활용
	베트남	베트남 후에 수도시설 개선사업	`16.1~12	87백만원	테크윈시스템	본부예산

붙임2		베트남지역 수도시설 개선사업 대상 도시 현황

□ 껀터시(Can Tho City) 현황

○ 일반현황

- 껀터(芹苴)시는 호치민시 남서쪽 약 120km에 위치, 면적은 1,390㎢,

인구는 1.2백만명(2011년)으로 베트남 남부 메콩강 삼각주 최대도시로 이 지역의 경제, 문화, 과학의 가장 중요한 허브 도시임

- 2004년 “껀터성”에서 “껀터시”와 “하우장성”으로 나누어져 성급의 “중앙 직할시”로 지정 (5개 직할시 중 하나)

- 메콩강의 가장 큰 지류인 하우강의 남안에 위치하여

- 열대 몬순 기후로, 일 년 내내 덥고 습한 기온(연평균  약 27도)

- 연평균 강우량 1500mm, 우기는 5월 ∼ 11월, 건기는 12 ∼ 4월이고, 1년 강우량의 90%가 우기에 내림

○ 수돗물 관련 문제점

- 급속한 인구 증가와 경제 성장으로 인한 물 부족 발생

- 시 주변지역 지하수 오염과 하우강 하류로부터 해수의 유입이 크게 문제가 되어, 최근 지하수 추출을 엄격하게 금지시킴

- 껀터인민위원회는 해수 유입으로 인한 오염방지와 물수요 충족을 위해  2030년까지 새로운 취수시설과 수도 시설을 하우강 상류지역에 설치하는 마스터플랜을 수립, 민관협력을 통한 상수도 시스템 개선을 계획하고 있음

○ 지원도시 선정 사유

- 껀터시는 베트남 남부 메콩강 삼각주 최대도시로 이 지역의 경제, 문화, 과학의 가장 중요한 허브 도시이고 중앙정부 직할시임

- 껀터시 톳놋구 떤록(Tan Loc) 마을은 메콩강 지류의 섬마을로 2000년대 후반 이후 한국으로 결혼 이주가 많은 곳으로 최근 한국에서 역귀향 하여 사는 모자 가정이 많음

- 상수도시스템 개선계획을 마련하는 등 상수도 시설 개선의지가 높고, 발전가능성이 높아 향후 상수도사업 확대시 우리 기업 참여 가능성이 높음

□ 껀터시(Can Tho City) 상수도 현황

○ 상수도 일반현황

- 껀터시 도시지역 상수도 공급은 “건설부” 산하 회사로서 껀터상하수도회사(The Can Tho Water Supply and Sewerage Co., Ltd.(WSSC))가, 농촌지역 상수도 공급은 “농업 및 농촌 개발부”가 담당

- 껀터시 도시지역 상수도는 정수장 13개, 껀터상하수도회사 등 7개 회사가 공급서비스 담당

○ 껀터상하수도회사

- 회사명 : CANTHOWASSCO (Cantho Water Supply And Sewerage One Member Company Ltd)

- 주소 : 2A, Nguyen Trai, An Hoi Ward, Ninh Kieu District, Can Tho City

- 전화번호: (0710)****************

- 홈페이지: www.ctn-cantho.com.vn

- 전자우편: ctncantho@gmail.com

○ 껀터시(Can Tho City) 상수도 문제점

- 응집제 투입량 부족, 침전지 미운영, 미처리 슬러지 유출로 인한 정수장 생산성 부족

- 불충분한 파이프 공사로 인한 누수 문제

- 낮은 수압으로 인한 배수펌프의 불충분한 수압

□ 톳놋(Thot Not)구 현황

○ 일반현황

- 톳놋(Thot Not)은 껀터시 아래의 구(Urban District)임.

- 껀터시 중심에서 북서쪽 38km에 위치

- 인구는 196,610명(2007), 면적은 171㎢

- 톳놋구 떤록(Tan Loc) 마을은 껀터시와 하우장성을 가로지르는 메콩강 지류의 섬마을로 2000년대 후반이후 한국으로 결혼이주가 많은 곳으로  최근 한국에서 역귀향하여 사는 모자 가정이 많음

○ 상수도 현황

- 톳놋 지역의 상수도 급수율 : 57%임(2012)

- 톳놋 지역 정수장 생산량 : 7.1 천톤/일

- 특징

․ 하우강을 원수로 사용

․ 톳놋 지역의 정수장은 맥동식 침전지와 경사판 침전지 2개로 구성

․ 정수처리는 분말활성탄과 염소를 사용함

붙임3		한국환경기술원 지원사업 참여 절차

1) 사업제안 단계
사업제안서 모집공고 및 접수		□ 주관기관 : 모집공고 및 접수 □ 신청기업 : 지원사업 제안서 작성·신청 ※서울시: 진출대상 정부와 사업관련 협의(사업의향서, 서한 등)
⇩
대상사업 선정		□ 주관기관
⇩
시행계획 제출		□ 신청기업 : ODA 시행계획 제출
⇩
대상사업 확정		□ 국제개발협력위원회 : 의결 □ 주관기관 : 확정
⇩
2) 사업추진 단계
사업기획		□ 환경부․주관기관
⇩
시행계획 및 공고		□ 환경부 : 시행계획 확정 □ 주관기관 : 시행계획 수립 및 공고
⇩
신청 및 접수		□ 신청기업 : 지원사업 신청서 작성․신청 □ 주관기관 : 접수
⇩
선정평가		□ 주관기관 : 평가위원 구성 및 지원기업 선정 □사전 서류검토 → 발표․평가 → 확정
⇩
협약체결		□ 지원기업 : 협약서류 제출 및 민간부담금 입금 □ 주관기관 : 정부지원금 지급
⇩
중간진행상황 점검		□ 지원기업 : 중간진행상황 보고 및 사업비 집행내역 제출 □ 주관기관 : 보고서 검토 및 실사(필요시)
⇩
최종평가		□ 지원기업 : 최종보고서 및 사업비 사용실적보고서 제출 □ 주관기관 : 최종 연구결과 평가 및 사업비 정산
⇩
사후관리		□ 지원기업 : 사업수주 추진 □ 주관기관 : 사업추진 상황 점검 및 환경부 보고

붙임4		유관기관 타당성조사 참여 절차(해건협 등)

신청서 제출

□ 타당성 조사 사업제안서

□ 사업자등록증 사본 또는 법인등기부 등본, 국세/지방세 완납증명서

⇩

신청서 접수

□ F/S사업 제안서 평가위원회 회부

⇩

F/S사업 제안서 심의 및 평가

□ 지원대상사업 선정

□ 지원금액 결정

⇩

평가위원회 평가결과 보고

⇩

평가결과 참여기업에 통보, 협약서(전담기관/참여기업) 체결

□ 구비서류 제출

⇩

중간보고서 제출/최종보고서 제출/ 사업비 사용실적 보고 및 정산

붙임5		유관기관 현황

한국환경산업기술원

□ 명     칭 : 한국환경산업기술원(Korea Environmental Industry&Institue)

□ 설립근거 : 환경기술 및 환경산업 지원법 제5조의 3

□ 기관성격 :  환경부 산하의 정부출연기관

□ 설립목적 : 환경기술개발 및 녹색제품 구매의 효율적 지원과 환경산업 육성

□ 연    혁

○ 한국환경기술진흥원 설립(’00.9)

○ 친환경상품진흥원 설립(’05.9)

○ 양 기관 통합 결정(’08.8, 제2차 공공기관 선진화 방안)

○ 한국환경산업기술원 설립(’09.4.8, 준정부기관)

□ 조 직 : 2본부 7단 24실 3센터

※ 해외협력센터 운영 : 5개국(중국, 베트남, 인도네시아, 알제리, 콜롬비아)

□ 주요 기능

○ 환경기술 개발사업 기획·평가·관리

○ 환경산업 육성 및 해외시장 진출 지원

○ 환경표지제도 운영 및 녹색제품 보급 촉진

○ 기업 친환경경영 및 저탄소경영 활성화

○ 환경신기술 인증 및 기술검증

○ 환경산업·기술 전문인력 양성 및 일자리 창출

○ 환경산업·기술 정부 수집·활용·교육·홍보

□ 소재지

○ 서울시 은평구 진흥로 215

한국플랜트산업협회

□ 명     칭 : 한국플랜트산업협회(Korea Plant Industries Association)

□ 설립근거 : 민법 제32조

□ 기관성격 :  산업부관리 사단법인

□ 설립목적 :

○ 플랜트산업의 경쟁력 제고, 수출확대 및 회원 상호간의 이익 도모

○ 플랜트산업의 진흥과 국민경제 발전에 기여

□ 연    혁

○ 플랜트수출협의회 설립(2000)

○ 협의회 사무국 및 「플랜트수출지원센터」 설치(2002년)

□ 조직 및 인원

○ 조직 : 2본부 1추진단 7개 부서

□ 주요 기능

○ 해외 플랜트 타당성 조사(F/S)지원

○ 해외수주지원, 전문인력 양성

○ 중소형플랜트 수출지원

○ 민관협력지원, 통계 · 정보제공

□ 소재지

○ 서울 강남구 테헤란로 309(역삼동 702-2) 삼성제일빌딩 9층

해외건설협회

□ 명     칭 : 해외건설협회(International Contrators Assosiation of Korea)

□ 설립근거 : 해외건설촉진법 제23조

□ 기관성격 :  국토교통부 산하 특별법인

□ 설립목적 :

○ 기업의 해외건설활동 지원

○ 해외건설 정보의 수집, 분석, 보급으로 국제경쟁력 강화

○ 해외건설업의 건전한 발전 지원으로 국제수지 향상, 국민경제발전 기여

□ 연    혁

○ 사단법인 해외건설협회 창립(1976년)

○ 사단법인 해외건설협회 법인 등기(1977)

□ 조직 : 2본부 2센터 11개부서

※ 해외지부 운영 : 6개국(페루, 인도, 인도네시아, 카자흐스탄, UAE, 이집트)

□ 주요 기능

○ 신시장개척지원

○ 해외건설정책지원

○ 중소기업 수주지원

○ 해외건설 인력개발, 해외건설 취업지원

○ 정보네트원크 구축

□ 소재지

○ 서울특별시 중구 세종대로9길 42 (서소문동,부영빌딩 13층)