문서번호	도로보수과-1062
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장	동부도로사업소장
이민호	송광석	김환겸	01/26 송만규
협 조
	주무관		이문희
	주무관		박해웅
	주무관		이석연
	주무관		윤수정

2017년 포장도로 유지관리사업 추진계획

2017. 1

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

<안전하고 편안한 도로환경 제공을 위한>

2017년 포장도로 유지관리사업 추진계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 포장도로 및 도로․교통부속시설물(맨홀, 노면표시 등)에 대하여 세부추진계획을 수립하여 시민에게 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공코자 함.

	1		추 진 방 향

❍ 안전하고 쾌적한 도로․교통환경 제공으로 대시민 행정서비스 향상

❍ 철저한 품질관리 및 안전관리로 도로시설물 공용수명 연장

❍ 시민을 최우선으로 생각하는 효율적 업무 추진으로 공사중 시민        불편 최소화 및 예산 절감

	2		도로 및 부속물 현황

❍ 도로현황 : 36개 노선(연장 152.02km, 면적 5.745㎢)

❍ 도로부속물 현황                                 (단위 : m,개)

중앙분리대	방호울타리	미끄럼방지시설	충격흡수시설	과속방지시설	방음벽
7,109m	1,632m	37,105㎡	81개소	4개소	542m

❍ 교통안전부속물 현황                                  (단위 : m, 개)

시선 유도표지	시선유도봉	갈매기표지	도로반사경	무단횡단 방지시설
385	2,530	135	41	2,622m

❍ 맨홀현황                                               (단위 : 개)

총계	상수도	소화전	열공급	전기	통신	하수도	가스
13,530	4,749	118	47	1,316	3,392	3,357	551

	3		2017년 사업비 재배정 현황

□ 사업비 현황 : 6건 14,660백만원

연번	사업명		예산액 (백만원)	담당부서	비 고
계	6건		14,660
1	포장도로 유지보수	소 계	9,025
		노후포장도로 정비	6,254	도로관리과
		포장도로 긴급복구	1,847	도로관리과
		버스전용차로 정비	924	도로관리과
2	도로함몰예방사업		700	도로관리과
3	도로굴착복구 기금		3,000	도로관리과
4	맨홀정비	소 계	700
		불량맨홀 정비	500	도로관리과
		맨홀 정기점검	200	도로관리과
5	노면표시 유지보수		830	교통운영과
6	도로․교통 부속물 유지보수	소 계	405
		도로부속시설물	300	도로관리과	2.3일 재배정예정
		교통부속물	105	교통운영과

	4		사업별 세부 추진계획

포장도로 유지보수공사

❍ 기 본 방 향

- 아스팔트 포장 내구성 및 품질향상 증대을 위한 맞춤형 포장재질 사용

‣ 일반차로는 1등급 골재 사용으로 도로손상(포트홀, 소성변형등) 저감

‣ 버스전용차로, 사거리 정지선 구간 등 교통량이 많은 곳은 고내구성           포장재(SMA, 개질SMA, CRMA 등) 사용으로 공용수명 향상

‣ 표층외 중층이하구간은 재생아스콘사용으로 순환골재 활성화에 기여

- 기존 표층(5cm) 재포장 방식 탈피하여 하부층 균열 및 소성변형등을       감안하여 포장단면설계

‣ 서울형 포장설계법 구간은 품질시험소 결과에 따라 포장단면 결정

‣ 일반차로구간은 코아채취후 하부층 손상여부(균열, 변형)에 따라 포장단면 결정

- 노후포장도로 정비공사 및 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

‣ 노면표시공사 및 폐기물처리용역은 공사건별로 별도 발주

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

구 분	계	포장공사		굴착복구	불량맨홀정비	폐기물 처리	노면 표시
		일반	버스전용차로
계	9,025	6,391	924	300	180	550	680
노후포장도로 정비공사	6,443	4,904	189	300	150	400	500
포장도로 긴급복구공사	2,582	1,487	735	-	30	150	180

※ 노후포장공사비 300백만원은 굴착공사에 포함하여 차로복구시 인접한       노후포장구간 정비 및 우기시 소파보수 시행

※ 포장공사비 180백만원은 불량맨홀정비공사에 포함하여 포장공사구간내       불량맨홀 정비시행

도로굴착복구공사

❍ 기 본 방 향

- 도로유지관리측면을 고려하여 가급적 차로단위 복구 시행

‣ 굴착복구 승인전 협의단계에서 신청기관과 긴밀히 협의

- 도로함몰 예방 사업비를 포함하여 발주 시행

- 여름철 우기시 도로소파로 인한 긴급복구가 가능하도록 소규모 소파보수       공종을 포함하여 발주

- 폐기물처리용역은 별도발주하고, 노면표시공사는 포장도로 긴급복구공사와       통합하여 발주 시행

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

계	굴착복구공사		폐기물처리	노면표시
	굴착기금	도로함몰
3,700	2,700	700	150	150

※ 굴착복구공사에 노후포장공사비 300백만원을 포함하여 발주하여 차로복구시       인접한 노후포장구간 정비 및 우기시 소파보수 시행

※ 도로함몰 예방비 700백만원에서 100백만원은 성내교북단 도로침하구간에 사용

불량맨홀 정비공사

❍ 기 본 방 향

- 기술심사담당관 신기술 활용심의에 따라 지명경쟁입찰 시행

- 맨홀뚜껑소음 및 포장면과 단차발생 등 불량맨홀 조사하여 맨홀       관리기관과 사전협의후 맨홀 정비

- 노후포장도로 및 긴급복구공사구간내 불량맨홀 정비

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

계	불량맨홀공사	정기점검	비 고
700	500	200

※ 불량맨홀정비공사에 포장공사비 180백만원을 포함하여 발주하여 포장       공사구간내 불량맨홀 정비 시행

노면표시 일상유지보수공사

❍ 기 본 방 향

- 노면표시 퇴색, 마모, 오염등이 발생된 구간을 조사하여 재도색 시행

‣ 횡단보도와 정지선구간등 집중적으로 정비하여 교통사고 예방

- 서울지방경찰청 규제사항 및 각종 불합리한 교통개선공사 시행

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

계	노면표시 유지보수공사	비 고
830	830

도로․교통부속물 유지보수공사

❍ 기 본 방 향

- 도로관리과와 교통운영과 재배정예산에 대하여 효율적인 업무 추진을       위해 통합 발주 시행

- 노후, 파손된 도로․교통부속물을 조사하여 정비

- 도로시설물 세척작업을 위해 세척공종을 포함하여 발주

❍ 예산 사용 계획

(단위:백만원)

계	도로부속물	교통부속물	비 고
405	300	105

□ 사업별 공사세부추진 일정

사업명	설계일	심사일	공사발주	계약	착공
노후포장도로 정비공사	‘17.2.6	‘17.2.7	‘17.2.23	‘17.3.13	‘17.3.15
포장도로 긴급복구공사	‘17.2.6	‘17.2.7	‘17.2.13	‘17.2.27	‘17.3.2
도로굴착복구공사	‘17.2.6	‘17.2.7	‘17.2.13	‘17.2.27	‘17.3.2
불량맨홀정비공사	‘17.2.7 (신기술 심의)	‘17.2.10	‘17.2.20	‘17.3.6	‘17.3.8
노면표시 일상유지보수공사	‘17.2.3	해당없음	‘17.2.6	‘17.2.24	‘17.2.27
도로․교통부속물 유지보수공사	‘17.2.3	해당없음	‘17.2.6	‘17.2.24	‘17.2.27

	5		행 정 사 항

❍ 공사발주전 계약심사 및 일상감사 의뢰

❍ 상반기 예산 50%이상 집행을 위해 조기 발주 및 공사 시행

따로붙임 : 사업별 담당자 현황 1부.  끝.