	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	행정처분(시정보완조치명령) 재 연기요청에 따른 검토 보고(삼익*파트)

1. 관련근거

가. 화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제47조의2(조치명령 등의 기간연장)

나. 동법 시행령 제38조의2(조치명령 등의 연기) 및 시행규칙 제44조의2 (조치명령 등의 연기신청 등)

다. 예방업무처리규정 제5조의2(조치명령 등 기간연장)

라. 예방과-30037(2016.12.6.)호 『시정보완조치명령 연기요청에 따른 회신』

2. 위와 관련, 기 시정보완조치명령 연장 대상에 대하여 관계자(입주자대표)가 재 연기 신청을 하여 그 내용을 아래와 같이 검토한바,

가. 대    상 :****************

나. 시정조치명령 기한 :*************

다. *************************

라. ****************************

다. 요청내용 : 근본적인 안전을 위한 공사로 인한 공사기간 연장

라. 담당자 확인사항

1) 1차 연장(27일)을 허가 하였으나, 공사진행중 선로상의 전체적인 문제점을 발견하여, 입주자대표회에서 새로이 선로를 포설하는 공사를 하기로 결정

2) 지적사항에 대한 선로 공사를 제외한 내용은 아파트 자체에서 공사를 완료

3. 위의 재 연장신청 건은 해당 집합건물에서 확실하고 안전한 소방시설 보완을 위해, 임시적 보완보다는 전체적으로 선로를 새로 부설하여 보다 안전한 대상물로 관리하고자하는 의지가 있어, 시정보완 조치명령 재연장 신청을 [연기됨]으로 통지하고자 합니다.

붙 임 : 1. 조치명령등의 연기신청서 1부. 끝.

담당자	정승원		검사지도팀장	현동욱		예방과장	01/26 강경철
협조자
시행	예방과-2299	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-0506	/전송	02-2637-3119	/	ding2@seoul.go.kr	/	부분공개(6)