문서번호	시설과-503
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
손영민	공헌구	김명용	01/26 송천헌
협 조
	전략기획실장		윤대진
	총무과장		代강준민
	주무관		한상길

노후 하수관로 정비공사 발주(3차) 계획
『 안전하고, 쾌적한 서울대공원 조성 』 노후 하수관로 발주(3차) 계획

2017년 1월

(시 설 과)

「안전하고, 쾌적한 서울대공원 조성」

노후 하수관로 발주(3차) 계획

설치 30년이 경과되어 노후 및 파손된 하수시설물에 대하여 연도별로 체계적으로 보수 및 개량하는 사업으로 2017년 확보된 예산을 사용하여 하수시설물 정비공사를 시행코자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 하수도법 제12조 동 법 시행령 제10조(설치기준)

□ 서울대공원 노후 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계 용역(2015.9.30)결과 보고

Ⅱ		총사업현황

□ 총 시설물 현황

관 경	계	우수관로	오수관로	맨 홀	비 고
300~800㎜	44.9㎞	31.3㎞	13.6㎞	498개소

○ 공   사  명 : 서울대공원 노후 하수관로 정비공사(연차사업)

○ 총 공사개요 : 8,656m

- 노후 하수관(우수) 개량 : D=300㎜ ~ 800㎜,  L = 2,186m

- 노후 하수관(오수) 개량 : D=300㎜ ~ 800㎜,  L = 6,470m

○ 총 사업기간 : 2015. 3 ~ 2018. 12. 30(연차사업)

○ 총 소요예산 : 3,871,040천원(용역결과 기준)

○ 년도별 집행실적 및 계획

(단위 : 천원)

분 야	계	1,2차	3차	4차	비고
		‘15~’16년	‘17년	‘18년 이후
총사업비	3,871,040	1,500,160	700,000	1,670,880
공 사 비	3,578,000	1,207,120	700,000	1,670,880
용 역 비	293,040	293,040	-
사업개요	8,656m	2,456m	2,069m	4,131m

※ 차수별 완료 현황(1,2차)

(단위 : 천원)

연 도	사업비	사업개요			비고
		우 수	오 수	보도정비
계	1,207,120	570m	1,991m	61a
2015년	285,120		851m
2016년	922,000	570m	1,140m	61a

Ⅲ		2017년도 시행계획

○ 공 사 명 : 서울대공원 노후 하수관로 정비공사(3차)

○ 공사기간 : 2017. 3. ~ 9. 30.

○ 공사위치 : 종합관리소 및 청계저수지 주변

○ 공사금액 : 700,000천원

○ 공사개요 : A, B구간으로 나누어 비굴착 시행

연번	관 경	계	A구간		B구간		비 고
			우수	오수	우수	오수
계		2,069m	1,030m	321m	220m	498m
1	D300	793m	681m		-	112m
2	D450	615m	155m		130m	330m
3	D600	340m	194m		90m	56m
4	D800	321m		321m

○ 예산과목

공원이용시민 만족도 향상, 동물사 관리기능 및 야생동물 종보존, 공원안전         시설 보수 및 정비, 시설비, 노후 우,오수관로 개량공사

○ 입찰 방법 : 공개경쟁입찰(지역제한)

○ 입찰 참가자격

『건설산업기본법』에 의한 상하수도 설비공사업 면허를 보유한 업체로 입찰         공고일 전일부터 입찰일 까지 서울 또는 경기도에 주된 영업소를 둔 업체

Ⅳ		기 대 효 과

○ 노후 파손된 하수시설물 체계적 보수 및 개량으로 침수 사전 예방

○ 오접 및 하수관로 준설로 쾌적한 공원환경 조성

Ⅴ		향 후 계 획

○ 2017.  2. : 계약심사 의뢰 및 공사발주

○ 2017.  2. : 공사계약 및 착공

○ 2017.  9. : 공사완료

○ 중기 연차 사업으로 원활한 공사추진을 위해 당해연도 예산을 최대한 활용하여 사업 시행.

첨부 : 위치도 및 현황사진 1부. 끝.

공사 위치도 및 현황사진

		위 치 도

청계저수지

		현황사진