등록번호

도로시설과-1405

주무관

도로조명팀장

도로시설과장

안전건설국장

등록일자

2017.1.25.

가순종

정철모

소철호

전결 01/26

이우룡

결재일자

2017.1.26.

공개구분

대시민공개

협조

가로등시설물 [을지로외 5개소]

도로조명 개선사업 시행 계획보고

안전건설국

(도로시설과)

가로등시설물[을지로외 5개소]

도로조명 개선사업 시행 계획보고

가로등 시설물의 안정적인 관리 및 조명환경 향상을 위하여 노후된 도로조명에 대하여 개선사업 추진계획을 보고드림

Ⅰ		사업 개요

사업노선 : 을지로외 5개소

공사위치 : 을지로외 4노선 및 명동지역 내부

세종대로(서울역~남대문), 통일로(경찰청R~서울역),남대문로(남대문~한국은행), 을지로(을지로5가~을지로7가),  다산로(청계천~신당역), 명동지역(내부)

공사 규모 :

- 명동 명품거리 LED 보행환경 개선 : LED 60등 교체

- 을지로외 3개노선 가로등 개량공사

· 가로등주 134본 개량, LED가로등 155등 개량, 노후선로 2,170m 교체

- 통일로 LED광원 교체공사

· 가로등 147등 LED 개량, 조명탑 등기구 개량

공 사 비 : 약980,000천원 (시비)

Ⅱ		사업추진 계획

사업추진 절차

설계	▷	좋은빛 심의	▷	설계도서심사	▷	계약심사	▷	공사시행
자체설계		도시빛정책과		시 도로관리과		계약심사과(시) 감사과		도로시설과

공사발주 : 일반공개입찰(지역제한)

관급자재 구매 : 조달청 제3자 단가계약

공사감리

- 을지로외 3개노선 가로등 개량공사 : 서울시 시설관리공단 위탁

· 근    거 : 서울특별시 공사감독 위탁에 관한 조례 제4조

· 기대효과 : 굴착공사가 수반되는 공사는 자체감독으로는 한계가 있으므로 품질관리 및 공사장 안전관리를 위하여 시행

- 명동 및 통일로 광원교체 공사 : 자체감리

공사담당 지정

[단위 : 천원]

공사명	공사위치	공사금액	담당자
을지로, 남대문로 가로등 개량공사	을지로, 남대문로	380,000	나권희
세종대로, 다산로 가로등개량공사	세종대로, 다산로	340,000	가순종
통일로 LED광원교체공사	통일로	200,000	가순종
명동 명품거리 LED 보행환경 개선공사	명동중앙로 외	60,000	나권희

Ⅲ		세부추진 일정

공사기간 : 2017. 2. ~ 2017. 10.

공사추진 일정

- 명동 및 통일로 광원교체 공사

· 2017. 1.   : 설계완료

· 2017. 2    : 빛공해 심의 및 설계완료

· 2017. 2    : 공사발주

· 2017. 2 ~ 8.  : 공사시행

- 을지로외 3개노선 가로등 개량공사 (도로굴착 복구 병행)

· 2017. 1.   : 설계완료

· 2017. 2.    : 빛공해 심의 및 설계완료

· 2017. 3.    : 공사발주

· 2017. 3 ~ 10.  : 공사시행

Ⅳ		행정사항

가로등 공사계획을 충분한 홍보로 주민불편 최소화하고, 유관기관 사전협의 추진(교통표지판, 도로명표지, 사설안내표지 등)

공사에 대한 도로굴착 협의진행하여 2중굴착 방지.

붙임 : 공사별 위치도 1부. 끝.