문서번호	방재시설부-1411
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
고소영		김인숙	01/24 남궁용
협조
	주무관		이원영

「「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

B구간 옹벽 가시설 설치 실정보고 검토보고

2017.1.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」

B구간 옹벽 가시설 설치 실정보고 검토보고

「서울역 7017 프로젝트 건설공사」만리동광장 B구간옹벽 가시설 설치 실정보고에 대한 검토 보고임.

【관련근거 : 서울역(건)제17-53호(2017.1.23.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역 7017 프로젝트 건설공사

○ 공사위치 : 서울시 중구 남대문 5가 ~ 만리동 1가 62

○ 시 공 사 : 홍익건설산업(주), ㈜동원개발

○ 도 급 비 : 25,138,300,000원(조경 : 5,918,270,000원)

○ 공사기간 : 2016.04.18. ~ 2017.05.17.

□ 보고내용

○ 만리동광장 옹벽 B구간(L=103.9m, H=1.5~3.5)중 14m 가시설 설치

- 현    황  : 만리동 광장 옹벽B구간 서울역고가 쌓기부 측면에 인접하여 실시하는 터파기구간 14m가 사면의 안정(비탈면 표준경사 1:1.5)을 유지할 수 없어 H-형강과 토류판을 사용하여 가시설을 설치하여야 함. 이에 따라 가시설 설치비의 도급내역 반영을 위한 실정보고임

- 관련근거 : 국토부 건설공사 비탈면 설계기준(2011년)

쌓기재료	비탈면높이(m)	비탈면 상하부에 고정시설물이 없는 경우(도로)	비탈면 상하부에 고정시설물이 있는 경우(주택,건물 등)
입도분포가 좋은 양질의 모래, 모래자갈암괴, 암버럭	0~5	1:1.5	1:1.5
	5~10	1:1.8	1:1.8~1:2.0
	10초과	별도검토	별도검토
입도분포가 나쁜 모래, 점질토 사질토, 점성토	0~5	1:1.8	1:1.8
	5~10	1:1.8~1:2.0	1:2.0
	10초과	별도검토	별도검토
1) 상기표는 기초지반의 지지력이 충분한 경우에 적용함 2) 비탈면높이는 비탈어깨에서 비탈끝까지 수직높이임

○ 가시설 설치현황

평 면 도	가시설 측면도
가시설 전개도

○ 가시설 설치 변경수량

공종명	규격	단위	당초	변경	증·감	비고
말뚝천공	토사	m	-	52.0	52.0
H-PILE박기(천공후항타)	H-300x300x10x15	본	-	8.0	8.0
H-PILE뽑기	H-300x300x10x15	m	-	52.0	52.0
띠장설치(버팀용)	W300+S300	m	-	14.0	14.0
띠장철거(버팀용)	W300+S300	m	-	14.0	14.0
토류판설치및철거	T=60mm	㎡	-	49.0	49.0
강재손료(손료30%)	H300x300x10x15m/m	ton	-	5.230	5.230

○ 신규공종 단가적용

: 신규공종은 지방자치단체 공사계약 일반조건 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의

조정)에 의거하여 설계변경 당시에 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액 적용

- 토류판설치 및 해체(T=6㎝)(신규공종) =109,577원×80.027%(낙찰율)= 87,690원/㎡

○ 공사비 대비표

구 분	단위	수 량		금 액(단위:천원)		증·-감 (단위:천원)	비고
		당초	변경	당 초	변 경
말뚝천공	m	-	52.0	-	433	433	기존계약단가
H-PILE박기(천공후항타)	본	-	8.0	-	338	338	기존계약단가
H-PILE뽑기	m	-	52.0	-	196	196	기존계약단가
띠장설치(버팀용)	m	-	14.0	-	186	186	기존계약단가
띠장철거(버팀용)	m	-	14.0	-	116	116	기존계약단가
토류판설치및철거	㎡	-	49.0	-	4,297	4,297	신규단가
강재손료(손료30%)	ton	-	5.230	-	1,139	1,139	기존계약단가
직접공사비				-	6,705	6,705
제 잡 비				-	1,925	1,925
공급가액				-	8,630	8,630
부가가치세				-	863	863
도 급 비				-	9,493	9,493

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 만리동 광장 옹벽 설치시 가시설을 설치한 후 옹벽 터파기를 실시하여 근로자 및 하부 도로(만리재로) 통행의 안전을 확보한 시공사의 실정보고는 타당하다고 사료되며, 시공사의 『만리동 B형옹벽 가시설 설치』 실정보고를 검토한 결과 적정하다고 판단됨

□ 보고자 의견

○ 만리동광장 옹벽 설치시 가시설 설치에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 실정보고 승인 통보하여 현장 반영하고 향후 설계변경 시 정산 반영 조치하고자 함

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.