문서번호	보도환경개선과-312
결재일자	2017.1.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보도정책팀장	보도환경개선과장
조시형	장상규	01/05 서관석
협 조
	주무관		송승익

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

「보도 상 장애인 안전시설 정비사업」추진계획

2017. 1.

안전총괄본부

(보도환경개선과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

「보도 상 장애인 안전시설 정비사업」추진계획

□ 사업 목적

○ 보도 상 장애인 안전시설(점자블록, 턱낮춤)의 정비로 보행약자들의 보행권 증진 및 안전사고 없는 보행환경 조성

□ 추진 계획 (총사업비 : 2,220백만원)

○ 사업위치 : 용산구 등 21개구(종로,중구,동대문,서대문 제외)

○ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 10월

- 실시설계 1월~4월, ▸ 정비공사 5월~10월

○ 사업규모 : 관내 주간선도로(강남대로 등)

○ 사 업 비 : 총 2,220백만원

○ 추진방법

- 정비 필요구간 조사 및 사업비 산출을 위한 용역비(20백만원)를 각 자치구별재배정하여 실시설계용역 추진

▸ 설계비 총 420백만원 (21개구 × 20백만원)

- 실시설계 결과에 따라 각 자치구별 사업비 재배정하여 공사 추진

□ 추진 일정

○ 실시설계용역 시행                          : ‘17. 1월~4월

○ 사업비(공사비) 재배정 시행                 : ‘17. 4월

○ 공사 착수                                  : ‘17. 5월

○ 공사완료 및 사업비 지출                    : ‘17.10월.  끝.