투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공정관리 철저 및 공사계약사항 이행 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원드립니다.

2. 귀 사가 시공 중인 재사용플라자 건립공사의 현재 공정진행이 부진하므로 공정관리(인력, 자재 투입계획 등)를 철저히 하시어 4차공사 계약기간(2017.03.15)내 계약내용대로 공사가 완료 될 수 있도록 만전을 기 하시기 바랍니다.

3. 아울러, 4차공사 계약사항 미이행시 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법 제30조(지연배상금)등에 의거 불이익 조치됨을 알려드리니 유념하시기 바랍니다.

가. 주요 공정관리 대상

○ 사인몰 제작·설치 공사

○ 철재창호공사, 내장 및 수장공사

○ 조경공사, 토목공사 등.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	경기도 성남시 중원구 둔촌대로541번길 46(상대원동) 동원건설산업(주) 대표이사 김 영 현 귀하,서울특별시 송파구 백제고분로17길 54 (주) 서우건영 대표이사 김 기 수 귀하
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	01/25 김진용
협조자
시행	건축부-1532	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)