“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사 변경 계약 의뢰

1. 관광정책과-651(2017.1.12)호와 관련입니다.

2. 시행 중인 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사의 계약변경을 아래와 같이 시행코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사

나. 공사기간 : ’16.10.25 ~ ’17.3.15

다. 계약업체 : (합)한손전력공사(대표 : 이현상)

라. 도 급 액 : 154,532,000원

마. 예산과목 : 관광사업과, 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화, 서울
강점 특화관광 콘텐츠 확충, 서울이야기 발굴 및 확산, 시설비

바. 계약변경 내역

구 분	변 경 내 용
계약기간	당 초	16.10.25~17.3.15
	변경후	16.10.25~17.3.31

바. 계약변경 사유

- 문화관광 특화거리 및 여행자 편의시설 조성 공사 완료후 전기공사 준공가능

붙  임 : 1. 계약변경계획 방침 1부.
2. 합의각서 1부.  끝.

	관광정책과장
주무관	이정은		지역관광진흥팀장	고경인		관광정책과장	01/26 김재용
협조자
시행	관광정책과-1398	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)