문서번호	도로시설과-1250
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설기술팀장	도로시설과장
성기선		김흥근	01/26 김길남
협조

두모교 내진성능개선공사

계약방법 자문회의 개최 계획

2017.1.

안전총괄본부

(도로시설과)

- 두모교 내진성능개선공사 -

계약방법 자문회의 개최 계획

두모교 내진성능개선 공사의 교량받침 교체와 관련하여 추가손상 방지 및 장기적 안전성 확보를 위하여 내진성능개선 추가공사 시행전 계약방법 결정을 위한 전문가 자문회의를 개최하고자 함.

1		현 황

○ 두모교 내진성능개선 공사(완료)

- 공사기간 : 2013. 4. 29 ∼ 2015. 2. 16

- 공사내용 : 지진격리받침 교체 171개소, 디스크받침 교체 11개소

- 준공금액 : 6,112백만원

- 도 급 자 : 매일종합건설(주), (주)대명건설

내진성능개선공사 받침교체 현황

○ 두모교 내진성능개선 추가사업(예정)

- 사업기간 : 2017. 3. ∼ 2017.12

- 사업내용 : 미교체 교량받침(92개소)

- 사 업 비 : 3,000백만원

2		추진 경위

○ ’13. 4.29    : 두모교 내진성능개선공사 시행

○ ’14. 7.24   : P49, A3 신축이음부 단차발생(약 29mm) 확인

○ ’14. 7.26   : 단차발생부 임시보수(잭업인상) 및 긴급점검 실시(한국시설안전공단)

○ ‘14.11.24   : 시험시공(7경간 연속, A3~P20) 완료

- 기존 포트받침 6개소→디스크 받침으로 교체(즉시처짐 2~4mm 발생)

○ ‘14.11.24~ : 시공불량 받침 재시공(12개소 하자완료)

- 초과처짐 27개소 중 7개소, 소성변형 예상구간 28개소 중 5개소

○ ‘15.02.16 : 두모교 내진성능개선공사 준공

- 시공완료: 받침교체 182개소(지진격리받침 171개소, 디스크받침 11개소)

○ ‘15.05.19 : 두모교 내진성능개선 추가공사 시행방법 검토(본부장방침)

- 계약방법 : 제한경쟁입찰

※ 법률지원담당관 의견 : 직전 시공사와 수의계약 가능

○ ’16.03.03 : 정릉천고가 관련 두모교 긴급 특별안전점검 실시

- 두모교 “세그먼트 이음부 균열” 25개소 발견(’16.3.25~5.26)

○ ’16.09.15 : 우선(1단계) 긴급조치 시행

- 2014년 교량받침 편측교체로 인한 유해 비틀림 모멘트를 긴급히 소거 목적

- 긴급조치 : P38, P39 좌측 받침을 연직상향으로 잭업(P38: 6mm, P39: 10mm)

○ ’16.11.11 : 두모교 내진성능개선 추가공사 사업변경(본부장방침)

- 변경내용 : 받침교체(92개소) → 예비텐던 설치(26개소)

- 사 업 비  : 1,200백만원

○ ‘17.02  : 기 시공된 두모교 교량받침 교체(하자보수 예정)

- 공사기간 : 2017.2.~12.

- 공사개요 : 2014년 시공된 교량받침(182개소)

○ ‘17.03~  : 두모교 내진성능개선 추가사업(예정)

- 사업기간 : 2017.3.~12.

- 사업개요 : 미교체 교량받침(92개소)

3		자문회의 개요

○ 일    시 : ’17.12.1(수) 10:30 ~ 12:00

○ 장    소 : 서울시청 별관2동(도로시설과회의실)

○ 자문위원 : 5명

- 김종환  JH건설클레임연구소 대표(서울시기술심의위원, 계약관리)

- 유길상  ㈜코오롱건설 부사장

- 김솔비  법률지원담당관(법률전문)

- 김종호  재무국 계약심사과 토목심사팀

- 이강윤  시설관리공단 도로시설처장

○ 주요자문 내용

- 공사중 시공미흡으로 일부 재시공한 시공사에 수의계약 가능 여부

- 공사 하자관리를 위한 효율적인 계약 방법 등

	<수의계약 관계 법령>
○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다. 4. 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각 목의 경우 가. 공사에서 장래 시설물의 하자에 대한 책임구분이 곤란한 경우로서 행정자치부 장관이 정하는 기준에 적합한 직전 또는 현재의 시공자와 계약을 하는 경우

4		행정사항

○ 두모교 내진성개선공사 계약방법 결정 및 정비계획 수립

○ 외부 전문가 자문수당 지급

- 소요예산 : 200천원(1인당 100,000원)

- 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물품질향상 및

유지관리, 일반운영비, 사무관리비. 끝.