문서번호	시설과-504
결재일자	2017.1.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
한상길	공헌구	01/26 김명용
협 조

「서울대공원 렛서펜더 방사장 확장 공사 실시설계 용역」

준공기한 연기 검토 보고

2017. 1.

시 설 과

준공기한 연기 검토 보고

「서울대공원 랫서팬더 방사장 확장공사 실시설계 용역」 감독업무 수행 중 다음과 같이 준공기한 연기 사유가 발생하여 보고함.

Ⅰ		용역 개요

용 역 명	과업기간	계약금액(원)	계약자	비고
서울대공원 렛서펜더 방사장 확장 공사 실시설계 용역	2016. 11. 29. ~ 2017. 1. 27.	**********	********** ******

Ⅱ		연기사유

□ 준공기한 연기 요청 사유

- 동물원내 AI발생으로 전면 통제됨에 있어 과업중단으로 과업기간 부족

Ⅲ		조치의견

□ 준공기한 연기

-  위와 같은 사유로 준공기한을 아래과 같이 연기코자 함.

구 분	사 업 명	변 경 사 항		비고
		당 초	변 경 후
사업 기간	서울대공원 렛서펜더 방사장 확장 공사 실시설계 용역	2016. 11. 29. ~ 2017. 1. 27.	2016. 11. 29. ~ 2017. 3. 31.

- 지체상금 부과여부 : 미부과.   끝.