문서번호	주거재생과-1300
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주거재생정책팀장	주거재생과장
박현용		김창규	01/31 국승열
협조

『가리봉 앵커시설 활용 계획설계 용역』

용역 준공기한 연기보고

2017. 1.

가리봉 앵커시설 활용 계획설계 용역』

준공기한 연기보고

가리봉내 매입한 벌집의 “앵커시설 활용 계획설계”를 위한  용역 준공기한 연기 보고임

Ⅰ		개 요

❏ 용 역 명 : 가리봉 도시재생사업 앵커시설 활용 계획설계 용역

❏ 용역기간 : ‘16. 11. 7 ~ ‘17. 2. 5(착수일로부터 3개월)

❏ 계 약 자 : 이이케이건축사사무소 대표 유경동

❏ 용 역 비 : 20,900,000원 (금이억구십만원)

Ⅱ		준공기한

❏ 준공기한 연기

- 용역기간

· 당  초 : 2016.11. 7. ~ 2017. 2.   5. (90일간)

· 변  경 : 2016.11. 7. ~ 2017. 2. 27. (120일간)

- 용 역 비 : 변경없음

- 귀책사유 : 서울특별시

- 지체상금 : 미부과

❏ 연기사유 및 조치계획

- 앵커시설의 활용 계획수립 관련 주민의견 수렴 및 내실있는 성과물

완성을 위해 용역기간을 연장하여 추진하고자 함

첨부 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.