문서번호	급수운영과-2263
보존기간	년
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
정헌석	이경희	최철민	01/31 전영석
협 조
	시설관리과장		김기상

2017년도

노후 배·급수관 정비사업 추진계획

2017. 1. 31.

남부수도사업소

(급수운영과)

『2017년도』

노후 배·급수관 정비사업 추진계획

건강하고 맛있는 아리수를 공급하고자 누수 및 부식에 취약한 노후 배·급수관 정비사업 추진계획을 보고 드림.

□ 근 거

○ 누수방지과-499(‘17.1.13.) : ‘17년도 노후 배급수관 정비사업 추진계획

Ⅰ		사업개요

□ 추진현황 : 52㎞(1,927㎞ 중 1,884㎞정비 완료)

구 분		정비대상	정비실적 (‘84~‘16)	‘17년 정비계획	‘18년~
배급수관 (350㎜ 이하)	연장(㎞)	1,927.0	1,884.2	12.8	30.0
	사업비(억원)	3,461.3	3,361	100.3	-

□ ‘16년 추진실적(목표:11.9㎞ / 실적:12.2㎞)

구 분	계	단위공사 (80~300㎜)	연간단가
			급수공사 (100~300㎜)	누수복구 (50㎜이하)
계	12,229	9,765	570	1,894
급수운영과	5,169	4,599	570	-
시설관리과	7,060	5,166	-	1,894

Ⅱ		‘17년 추진계획

○ 정비목표 : 12,800m(정비대상:13,055m)

(단위:m,백만원)

구분 구별	계		단위사업			연간단가
	연장	사업비	건수	연장	사업비	연장	사업비
계	13,055	10,037	6	12,470	9,657	585	380
영등포구	4,690	3,919	2	4,590	3,879	100	40
동작구	2,200	1,363	1	2,000	1,187	200	176
관악구	4,050	2,855	2	3,830	2,729	220	126
금천구	2,115	1,900	1	2,050	1,862	65	38

○ 사업기간 : ‘17년 3월 ~ 11월

○ 추진내용

- 누수발생 및 녹물 출수 구간 우선 정비

- 노후관의 경과년도가 오래된 구간 선정

- 단절관 등을 순환 배관망이 형성되도록 연계 정비

Ⅲ		세부 추진계획

□ 공사 방법

○ 세척갱생관, 무라이닝 : 단위사업 및 연간단가 사업으로 발주

- 단위사업 발주

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	담 당
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 6건		150～300	12,470	9,657
1	여의도동 15~15-3외 8개소 배급수관정비공사	200~300	2,270	1,862	안규태
2	대림동 681-5~688-2외 6개소 배급수관정비공사	150~300	2,320	2,017	구본천
3	신대방동 346-25~342-87외 7구간 배급수관정비공사	150~300	2,000	1,187	전소영
4	은천동 959번지 주변외 3개소 배급수관 정비공사	100~200	1,660	812	김재엽
5	서원동 10번지 주변외 1개소 배급수관 정비공사	200	2,170	1,917	서장원
6	가산동 481-10~327-33번지외 1개소 배급수관 정비공사	300	2,050	1,862	최선보

- 연간단가계약공사 시행

연번	공 사 명	공사개요		사업비 (백만원)	담 당
		구경(㎜)	연장(m)
계 : 4건		80~150	585	380
1	영등포구 관내 상수도공사	150	100	40	정성오
2	사당1동외 14개동 상수도공사	100~150	200	176	한규수
3	보라매동외 9개동 상수도공사	100	220	126	김재엽
4	가산동외 9개동 상수도공사	80	65	38	최선보

□ 단위사업 발주일정

○ 설계도서작성 : ‘17. 2. 10.한

※ 본부 도면심사 완료 : ‘17. 1. 24.

○ 계약심사 및 발주 : ‘17. 2.

○ 계약 및 착공 : ‘17. 3.

○ 공사준공 : ‘17. 10.  끝.