문서번호	소방행정과-1363
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김현태	천완주	윤봉수	01/31 장현태
협 조
	설계공모관리팀장		代김진수
	주무관		배선혜

「금천소방서(가칭)」

설계공모 홍보 등 진행사업 시행계획

2017. 1.

구로소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

금천소방서(가칭)
설계공모 홍보 및 심사지원 사업 시행계획

「금천소방서(가칭)」설계공모 관련 번역, 홍보, 각종 인쇄물 제작 및 발송, 심사진행 등의 업무를 전문 업체에 의뢰하여 효과적이고 원활하게 시행하고자 함

Ⅰ		사업개요

사 업 명: 금천소방서 설계공모 홍보 및 심사지원 용역

사업기간: 계약일로부터 ~ 2017. 4. 30.(공모 공고 ~ 용역결과제출)

계약방법: 수의계약

○ 수의계약 근거:「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제25조 제1항 제5호 및 제30조 제1항 제2호

Ⅱ		추진경위

추진근거

○‘16.09.13: 금천소방서 신설계획 수립(시장방침 제276호)

○‘16.11.14: 금천소방서 신설계획 추진계획(안)

추진경위

○‘16.11.24: 금천소방서 설계공모 요청(소방행정과-17153)

○‘16.12.06: 금천소방서 설계공모 시행방침 수립(도시공간개선단-15463)

○‘16.12.12: 금천소방서 설계공모 전문위원회 구성 및 운영 계획

Ⅲ		추진계획

추진방향

○ 설계공모지침서 등 번역

- 설계공모 지침서, 관련 제공자료,  질의응답서 등

○ 설계공모 홍보

- 국내·외 홍보계획 수립 및 홍보포스터, 도록 제작

- 인쇄·발송·관리, 홍보물 게시

- 입상작 홍보 자료 작성

○ 설계공모 진행, 심사운영 지원

- 심사 관련 집기 임대, 심사 및 회의진행 경비, 심사진행 및 기타 인력지원

과업내용

1. 금천소방서(가칭) 신설 설계공모요강 및 번역 및 감수

- 설계공모지침서 및 공모요강 번역 및 감수

- 보도자료 및 질의응답 등 대외 커뮤니션 번역 및 감수

2. 금천소방서(가칭) 신설 홍보물 디자인 제작 및 발송관리

- 홍보포스터 및 디지털 이미지(홈페이지용, 대외홍보용) 디자인

- 국내 건축 관련 학회 및 협회 홍보 포스터 배포

- 국내외 건축, 디자인 관련 커뮤니티 프레스킷 배포

3. 금천소방서(가칭) 신설 설계공모 심사지원

- 공모 전 홈페이지 게재 및 관리

- 국설계공모 심사를 위한 패널제작, 대여, 설치 및 철거

4. 기타 금천소방서(가칭) 신설 설계공모 실행에 필요한 제반업무 지원

업무수행 범위

○ 구로소방서: 용역계약 및 준공에 대한 행정업무 추진

○ 도시공간개선단: 용역사항 이행에 대한 감독 및 준공검사

- 서울특별시 재무회계규칙 제6장「계약」제1절「계약의 일반사항」제111조

「검사자의 지정」규정에 의하여 감독자 및 검사자 지정 운영

예산현황

○ 소요 용역비: 21,000천원

- 산출근거: 서울시에서 실시한 사업의 계약 실적이 있는 업체 별 견적금액

- 조사대상: ㈜디자인오아시스 등 3개소(붙임 산출기초조사서 참조)

○ 예산과목: 소방행정기반강화 / 직무환경개선 / 금천소방서 신설 / 시설비

Ⅲ		향후계획

사업추진일정

○‘17.01.31. ~ 02.05.: 용역시행 자료조사

○‘17.02.05. ~ 02.07.: 계약체결

○‘17.02.07. ~ 02.10.: 홍보물 제작 배포 및 발송

○‘17.03.30. ~ 04.11.: 기술검토 및 작품심사(1, 2차)

설계공모 세부일정

○‘17.01.25.          : 설계공모 공고

○‘17.02.25. ~ 02.24.: 참가등록

○‘17.02.10.          : 현장설명회

○‘17.02.10. ~ 02.15.: 질의접수

○‘17.02.28.          : 질의응답

○‘17.03.27.          : 작품접수 마감

○‘17.03.30.          : 기술검토

○‘17.04.04.          : 작품심사(1차)

○‘17.04.11.          : 작품심사(2차)

○‘17.04.14.          : 당선자 및 입상작 발표(서울시 홈페이지 공지)

※ 상기 일정은 업무추진 상황에 따라 조정 될 수 있음

붙임: 1. 「금천소방서」설계공모 추진계획 1부.

2.  산출기초조사서 1부.

3.  견적서 3부(종이문서).  끝.