문서번호	한양도성도감-1119
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★주무관	도성학술팀장		한양도성도감과장		문화본부장
최지애	김서란		심말숙		01/31 고홍석
협 조

한양도성 각자성석 보존을 위한

풍화상태 조사 계획

2017. 1

문 화 본 부

(한양도성도감)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

한양도성 각자성석 보존을 위한 풍화상태 조사계획

각자성석 보존처리를 실시하기에 앞서 풍화가 심하게 진행된 낙산구간 각자성석의 풍화 상태조사를 직접 실시하여 적합한 보존처리 방안을 마련하고자 함

Ⅰ		그동안 추진사항

○ `15. 1월      : 각자성석 현황조사 및 목록화(총 300여개)

○ `16. 5월      : 각자성석 과학적 보존대책 필요 제기(이코모스 자문)

○ `16. 7~10월 : 한양도성 각자성석 시범 보존처리 및 3D스캔(5개소)

Ⅱ		문제점 및 사업 필요성

○ 외부 환경요인(물, 온도변화 등)에 의한 균열, 박리박락, 탈락 등으로 각자의 손상발생

○ 대기 오염물(분진, 유기 및 무기화합물)에 노출된 각자는 검게 변색되고, 지의류, 초본

식물이 생성한 유기산에 의해 각자가 분해되고 풍화가 가속화되어 훼손되고 있음

○ 풍화․훼손상태를 조사하여 보존처리가 시급한 각자성석을 선별하여 적합한 보존처리

방안을 수립하는 것이 시급함

Ⅲ		사업 개요

○ 사 업 명 : 한양도성 각자성석 보존을 위한 풍화상태 조사

○ 사업기간 : `17. 3 ~ `17. 12 (10개월)

○ 사업내용

- 육안관찰, 사진촬영(원거리, 세부 정밀사진), 디지털현미경 관찰 등을 통한 각자성석의 상태기록

- 반발식 경도계를 이용하여 각자성석의 경도 등 표면물성을 분석하여 풍화등급 산출

-  각자성석의 다양한 훼손양상과 분포를 적합한 범례와 기호를 이용하여 훼손지도 제작

※  각자성석 보존처리 장기계획(총 300여개)

‧낙산 각자 풍화조사

(각자성석 60개)

‧낙산‧남산 각자

풍화조사

(각자성석 60개)

‧낙산 각자 보존처리

‧남산 각자 풍화조사

(각자성석 60개)

‧낙산‧남산각자

보존처리

‧처리후 모니터링

‧백악 각자 풍화조사

(각자성석 60개)

‧남산 각자 보존처리

‧처리후 모니터링

‧인왕 각자 풍화조사

(각자성석 60개)

‧백악 각자 보존처리

‧모니터링 지속

`17년 직접수행      `18년 직접+용역      `19년 직접+용역      `20년 직접+용역      `21년 직접+용역

Ⅳ		세부 추진계획

□ 각자성석 상태조사(약 60개소)

○ 육안관찰, 정밀 사진촬영, 디지털현미경 관찰을 통해 각자성석의 훼손양상과 풍화

원인을 분석하고, 각자성석 조사기록표를 작성

○ 촬영한 각자성석 이미지를 그래픽 프로그램을 이용하여 전산화 도면을 제작

□ 각자성석 경도 측정(풍화등급 산출)

○ 비교적 적은 타격력으로 측정되는 에코팁 경도계를 활용하여 각자성석의 표면물성을 측정

○ 신뢰도 있는 측정값을 얻기 위해 동일한 지점을 10회 이상 측정하여 평균, 최대값, 최소값,

표준편차 값을 얻어야 함 ※ 측정 지점 4곳 이상 설정, 각자성석 1개소당 약 40회 이상 경도 측정

○ 측정된 경도 값은 각자성석 표면 거칠기 상태에 따라 보정계수를 적용하여 데이터 분석

○ 경도값에 따라 기초 풍화등급을 산출하고, 초음파 측정값을 보완하여 최종 풍화등급 산출

□ 각자성석 풍화‧훼손지도 작성

○ 전산화 도면에 훼손양상과 분포를 적합한 범례와 기호를 이용하여 정밀기록

○ 표면풍화도의 변화와 원인을 분석하기 위해 훼손 유형별 점유율을 산출하여 정량적 훼손도 평가

<보물 제185호 부여 무량사 오층석탑 훼손지도 작성사례>, 사진출처: 국립문화재연구소

Ⅴ		추진방법 및 소요예산

○ 추진방법 : 학예연구사 직접 수행

- 직접수행을 실시함으로써 예산절감 효과 **********************

- 한양도성의 진정성 및 학술적 가치에 적합한 보존처리 설계가능

- 각자성석의 장기적 보존방안을 위한 상태 데이터를 직접 수집함으로써 데이터 활용도

(설계, 학술조사, 모니터링 등)를 높일 수 있음

○ ******************

***************************************************

Ⅵ		기대효과 및 향후일정

○ 기대효과

- 풍화상태 조사기록표와 훼손지도를 작성하여 보존‧관리 방안을 수립

- 정량적 훼손도 평가를 통해 보존처리 범위 선정과 보존처리 기초자료 제공

- 보존처리를 실시한 후, 각자성석 모니터링 자료로 활용

○ 향후일정

- `17년 2월     : 사업계획 확정, 물품구입 및 각자성석 사전조사

- `17년 3~11월 : 각자성석 풍화 상태조사 직접 수행

- `17년 12월    : 사업완료 및 각자성석 풍화 상태조사 보고서 작성

※ `18년 풍화‧훼손상태가 심한 각자성석부터 과학적 보존처리 시행

붙  임 : 각자성석 조사기록표 1부.  끝.