문서번호	조경과-1435
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도시녹화팀장	조경과장
이소연	김원식	01/31 이원영

- 2016년 아름다운 정원 가꾸미 사업관련 -

간담회 개최 결과

2017. 1.

푸른도시국(조경과)

- 2016년 아름다운 정원 가꾸미 사업관련 -

간담회 개최 결과

“2016년 아름다운 정원 가꾸미” 사업완료에 따라 업무 개선을 위해 관계자와 참여자들의 소통 간담회를 개최하고 그 결과를 보고드림

1		사업 개요

❍ 사 업 명 : 2016 아름다운 정원 가꾸미 사업

❍ 위    치 : 평화의공원 내 녹지

❍ 사업대상 : 정원 총 20개소 (4,000㎡)

❍ 사업기간 : 2016. 3. ~ 11.30

❍ 사업내용 : 서울정원박람회 기간에 조성된 정원을 민관 협력 관리

❍ 소요예산 : 50,767천원(민간경상보조금)

2		간담회 개요

❍ 일    시 : 2017. 1. 25.(수) 16:00 ~ 17:30

❍ 장    소 : 무교별관 조경과 회의실

❍ 참 석 자 : 총 8명

- 시(3명) : 조경과장, 도시녹화팀장 및 담당자

- 아름다운 정원 가꾸미 1기(5명)

: *****************************

❍ 주요안건

- 2016 아름다운 정원 가꾸미 활동사항에 대한 토론

- 향후 아름다운 정원 가꾸미 사업에 대한 개선 및 발전방안 논의

3		토론 결과

❍ 문제점

- 정원관리 일정이 매주 고정된 시간에 이뤄지다보니 개인적인 사정 및 다른 활동 등으로 인해 참여도가 저조함

▶ 총 37회 활동 중 정원작업활동은 31회 이뤄졌으며, 매회 평균 6~7인 참여 (정원작업활동 31회, 정원해설 4회, 소통2회)

- 사업초기계획에서는 3~4개의 정원당 시민정원사 5인 조별 지정관리로 배치하였으나, 매회 참여도가 저조하여 전체 정원을 합동작업으로 관리되어 책임도가 떨어졌음

- 각 정원 작품의 주제와 맞는 식재스타일 등의 작품 특성에 따라 관리가 되어야했으나 작가와의 소통이 부족하였고 보식 등 관리가 지정된 날짜에 일률적으로 이뤄지다보니 작가정원의 특색을 잃었음

❍ 개선방안

- 정원관리 일정 및 관리

▶ 기존의 매주 1회(목요일 오후)였던 관리일정을 매주 2회(화요일 오전, 목요일 오후)혹은 그 이상으로 변경하여 참여자들이 부담 없이 참여, 전체 참여도를 높임

▶ ‘정원 관리 활동지’ 제출로 활동사항 관리

- 작가정원 지정관리제

▶ 3~4개의 정원을 4~5명 지정하여 고정 배치, 조별 책임관리가 이뤄지도록 하고 정원관리자에 대한 “관리자 안내판”을 별도 설치하여 각 정원에 대한 책임감을 높임

※ 아름다운 정원가꾸미 1,2기를 대상(총60명)으로 2월중 워크숍을 개최하여 실질적으로 참여 가능한 인원 모집, 배치

▶ 정원을 조성한 작가와 시민정원사간의 직접적인 소통이 이뤄지도록 하여 정원의 특색을 살리도록 함

3		향후계획

❍ 토론결과 향후 “2017년 아름다운 정원 가꾸미 사업” 계획 수립시 반영.  끝.