문서번호	기전과-911
결재일자	2017.1.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		박심근	01/31 이종엽
협조
	주무관		문준호

2017년 교량 경관조명 유지관리 계획

2017. 1.

성동도로사업소

(기 전 과)

2017년 교량 경관조명 유지관리 계획

2017년 교량 경관조명의 노후 및 민원사항에 대해 체계적이고 지속적인 유지관리로 경관조명 조성에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 2017년 도로기전·교통시설물 및 건설장비 유지관리 계획

(기전과-594. 2016.1.18.호)

Ⅱ		시설개요

□ 시설현황

구분	광진교	영동대교	성수대교	동호대교	청담대교 북단고가하부	총 계
조명등	145	1,192	858	622	706	3,523
분전함	2	2	2	3	3	12
계약전력 (KW)	15	17	103	128	30	293

※『겸재교 건설 및 도로확장 전기공사』준공 도래에 따른 겸재교 경관조명 인수·인계 협의중.

Ⅲ		추진계획

□ 2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 사 업 명 : 2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 12.

○ 사 업 비 : 45,000천원

○ 추진방법 : 제한경쟁입찰

○ 계약방법 : 연간단가계약

○ 입찰참가자격 및 제한규정

- 자격 : 전기공사업법에 의한 전기공사업 면허등록업체

- 제한 : 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체

□ 영동대교 경관조명 추가설치(LED-Bar)

○ 사업내용 : 영동대교 경관조명 미설치구간(1번~2번, 12~14번교각사이)의 LED-Bar 추가설치

○ 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 6.

○ 사 업 비 : 178,000천원(LED-Bar 구매비용 포함)

○ 추진방법 : 제한경쟁입찰

○ 추진계획

- LED-Bar 구매 : 조달구매(제3자 단가계약)

※ 영동대교 경관조명 목적 이미지『리듬속에 매혹적인 빛』을 표현함에 있어 미설치 구간으로 소등중인 LED-Bar 6경간 교체에 소요되는 자재는 통일성을 유지하기 위하여 2016년도 구매한 LED-Bar와 동일 제품 구매 예정.

□ 광진교 경관조명 투광등기구 구매설치

○ 사업내용 : 광진교 교량측면에 점등되는 투광등 74등(커버) 제작·설치

○ 사업기간 : 2017. 2. ~ 2017. 3.

○ 사 업 비 : 7,000천원(커버 제작 및 설치비용)

○ 추진방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 5호 나목(소액)

○ 추진계획

- 광진교 투광등(커버) 제작 전문업체중 저가 금액을 제시한 업체와 계약을 추진하고 투광등(커버) 74등을 제작·설치하여 빛공해 민원을 해소코자 함.

Ⅳ		행정사항

□ 2017년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 2017. 2 : 설계 및 공사발주

○ 2017. 2 ~ 2017.12 : 계약 및 공사시행

□ 영동대교 경관조명 추가설치(LED-Bar)

○ 2017. 2 : 공사발주 및 LED-Bar 조달구매

○ 2017. 3 ~ 2017. 6 : 물품납품 및 공사준공

□ 광진교 경관조명 투광등기구 구매설치

○ 2017. 2 ~ 2017. 3 : 커버 제작 및 현장설치

□ 예산과목

○ 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 한강교량 및 도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비.  끝.