문서번호	주차계획과-4004
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주차계획팀장	주차계획과장	교통정책관		도시교통본부장
이겨라	신만철	안석진	백호		03/25 김경호
협 조

서울역 관광버스 주차장 설치 및 운영계획

2014.  3.

도시교통본부

(주차계획과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	예시 : 도로교통법 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	중구청	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

서울역 관광버스 주차장 설치 및 운영계획

서울역 서부교차로 인근 안전지대 삭선후 관광버스 주차공간을 확보하여 도심 관광버스 주차난 완화에 기여하고자 함

▢ 설치 및 운영개요

❍  조성목적 : 관광성수기 명동, 남대문 일대 관광버스 주차공간을 마련하여 도심 관광버스 주차난 해소에 기여 및 관광객 편의 증진

❍  위    치 : 서울역 서부교차로 안전지대 (중구 만리동1가 22-1 인근)

❍  규    모 : 6면 (약 931m2)

❍  소요예산 : 99백만원

- 안전지대 삭선 후 주차구획선, 방호울타리, 횡단보도 설치

❍  운영기간 : 매년 4.1 ~ 10.19

- 겨울철에는 서부도로사업소에서 제설전진기지로 활용하여 미운영(10.20~익년 3.31)

▢ 추진경위

❍ ’13.5.27 : 관광버스 주차공간 확보를 위한 제설전진기지 활용기간 질의

- 겨울철 제설전진기지로 사용해야 하는 기간 질의 (주차계획과 → 서부도로사업소)

❍ ’13.5.28 : 관광버스 주차공간 확보를 위한 제설전진기지 활용기간 질의 회신

- 제설전진기지는 10.20~3.31까지 운영, 방호울타리 설치시 협의 (서부도로사업소 → 주차계획과)

❍ ’13.5.31 : 교통안전시설 개선설치 통보 (서울지방경찰청 → 시)

- 전세버스 16인승 이상 주차허용 (단, 10.20~익년3.31일까지는 제설전진기지로 운영)

▢ 추진일정

❍ ’14.3 : 사업비 재배정 (시 → 중구청)

❍ ’14.4 : 공사발주 및 시행

❍ ’14.5 : 공사완료 및 주차장 운영

▢ 협조사항

❍ 중구청 주차관리과 : 관광버스 주차장 설계 및 공사

❍ 서부도로사업소 : 방호울타리 설치 관련 협의 등.

붙임 : 1. 상세도면 1부.

2. 사업비 내역 1부. 끝.