투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국전력공사 사장
(경유)	경인건설처장
제목	업무협의 회신

1. 경인건(환) 62101-238(2014. 02. 26)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사와 귀 공사에서 병행으로 추진중인 율곡로 전력구 이설공사의 기존 송전관로 이설시기 일정 문의 등에 대해 아래와 같이 검토의견을 회신 하오니 업무에 참조 하시기 바랍니다.

가. 협의내용

- 율곡로 창경구앞 도로구조개선공사 구간내 기존 송전선로 이설시기

- 지장전력설비 이설공사 협약서(대관 인, 허가는 한전과 협의하여 도시기반시설본부에서 시행)에 의거 도시기반시설본부에서 도로굴착 및 점용허가를 득하여 주시기 바람.

나. 검토의견

- 기존 송전선로 철거는 지하차도 구간, 공사 시점부, 공사 종점부 순으로 시행할 예정이나 철거는 2015년 3월경 이후에 가능하며 부득이 토목 공정이 지연될 경우에는 철거시기도 순연될 수 있음.

- 협약서에 의거 도로굴착 및 점용허가의 우리본부 대행 신청에 따른 도로점용 허가신청서 작성 통보 요청.[도로법 시행규칙(별지 제21호서식 및 첨부 서류 : 설계도면 1부, 주요지하매설물 관리자의 의견 1부, 주요매설물의 사후관리계획 1부)].   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박천용		광역도로과장	代조양연		토목부장	03/25 노우성
협조자
시행	토목부-5614	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2558	/전송	02-3708-2599	/	park8370@seoul.go.kr	/	대시민공개