투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	(주)엠티마스타 대표 이화선
(경유)
제 목	「해양관 외부방사장 등 시설개선공사」공사중지 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016.11.28. 계약한「해양관 외부방사장 등 시설개선공사」에 대하여 아래와 같이 공사중지 통보하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 사유 : 해양관에서 사육중인 돌고래 이동시기가 5월 이후로 연기됨에 따라 공사시행 불가

나. 기간 : 2016.12.18. ~ 2017.3.31.  끝.

	서울대공원장
주무관	김용주		시설과장	02/01 공헌구
협조자	주무관	배진수
시행	시설과-561	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02) 500-7054	/전송	02) 500-7059	/	kyjoo@seoul.go.kr	/	대시민공개