문서번호	시설과-554
결재일자	2017.2.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장
김용주	공헌구	02/01 김명용
협 조
	주무관		배진수

해양관 외부방사장 등

시설개선공사 공사중지 보고

2017. 2

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

해양관 외부방사장 등

시설개선공사 공사중지 보고

해양관 외부방사장 등 시설개선공사와 관련하여 돌고래 이동시기가 5월 이후로 연기됨에 따라 향후 돌고래 이동시점 1개월 전(물범 등 임시방사장 설치기간)까지 공사를 중지 하고자 함

※ 동물원 AI 비상대책상황보고 회의시 결정 : 2016.1.13.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 해양관 외부방사장 등 시설개선공사

□ 건물규모 : 지하1층/지상2층, 연면적 4,584.33㎡, 외부방사장

2,347.87㎡

□ 공사기간 : 2016.11.30. ~ 2017.5.28

□ 계약금액 : 806,464,390원

□ 계 약 자 : ㈜엠티마스타 대표 이화선

□ 공사내용

○ 하마사에 물범 등 임시사육시설 설치

○ 외부방사장 7개소 그늘막교체, 인조암 보수

○ 외부방사장 균열보수 및 방수공사

○ 내부사육실 수조 및 천장보수

○ 관리실 환경개선공사(화장실·샤워실 설치 및 환기설비 신설)

○ 관람석 안전난간 설치 등

Ⅱ		그간 추진사항

□ 2016. 11. 16 : 물범 등 임시방사장 설치 관련 검토회의

□ 2016. 11. 28 : 공사계약

□ 2016. 11. 30 : 착공

□ 2016. 12. 1~ 12.22 : 물범 등 임시방사장 설치공사 설계

□ 2016. 12. 16 : 물범 등 임시방사장 설치 요청(동물복지1과→시설과)

□ 2016. 12. 18 : AI관련 동물원 휴원 및 출입통제

□ 2016. 12. 23 : 물범 등 임시 방사장 설치계획 수립

□ 2016. 12. 26 : 변경계약 체결(물범 등 임시방사장 설치 추가)

Ⅲ		보 고 내 용

□ 중지사유 : 동물원내 AI 발생으로 2016.12.18.부터 공사중지된 상태이며, 동물원에서 돌고래 이동시기를 5월 이후로 연기함에 따라 현재는 공사시행이 불가함

□ 중지기간 : 2016.12.18 ~ 2017.3.31

※ 하마사에 설치예정인 물범 등 임시방사장 조성에 약 1개월이 소요되므로 돌고래 이동시기 1개월 전까지 공사중지

Ⅳ		조 치 사 항

□ 계약업체에 위와 같이 공사중지 통보