기  성  보  고  서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	문병희	김근용	02/03 代김근용

명에 의하여 ’16년 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속) 기성금 신청(7차) 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2017.  2. 3

보 고 자 : 지방시설주사   문 병 희

강서수도사업소장 귀하

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2016년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속공사)

나. 착 공 일 : 2016. 5. 02

다. 준공기한 : 2017. 6. 30

라. 도 급 액 : 2,542,251,870원

마. 도 급 자 : (주)범흥건설, 대표 김 판 권

2. 기성금 신청현황

가. 위        치 : 강서구 화곡본동 98-106외 159건

나. 금회공사기간 : 2016. 12. 1  ~  12.31(31일간)

다. 기 성 금 액 : 214,423,000원

라. 예 산 과 목 : 상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 기타교체비(상수도관 누수복구)

상수도사업비, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(불용관정비)

3. 기성 내역

가. 기성내역                                                          (단위:원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	금회까지 누계금액	잔 액
도 급 액	2,542,251,870	1,603,140,000	214,423,000	1,817,563,000	724,688,870

나. 누수복구개요                                                   (단위 : 개소)

계	급수관	송･배수관	비 고(기타)
198	103	15	80

다. 세부내역

연번	구 경	공사개요(m)			비 고
		계	누수	불용 (인입,탐지)
계	D=13~50mm	265	127	138
1	D=13mm	39	22	17
2	D=20mm	133	71	62
3	D=25mm	30	19	11
4	D=30mm	0	0	0
5	D=40mm	34	8	26
6	D=50mm	29	7	22

4. 처리 의견

상기와 같이 2016년 강서,양천 구로구 일대 긴급누수복구공사 기성(7차)을 시행코자

합니다.

붙  임  1. 누수복구대장 1부

2. 기성내역서 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이병운 ☎3146-3990 / 총괄 : 문병희 ☎3146-3994 /담 당 : 박학중☎3146-4011