문서번호	누수방지과-1125
결재일자	2017.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이동욱	유승효	02/03 강신재

『2016년』노후 상수도관 정비공사 추진실적 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2. 3.

상수도사업본부

누수방지과

『2016년도』

노후 배급수관 정비공사 추진실적 보고

2016년도 노후 배급수관 정비공사를 완료하고 추진실적을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 정비목표 : 75㎞

○ 총사업비 : 62,000백만원

- 시설비  60,000백만원, 감리비 1,994백만원, 시설부대비 6백만원

○ 공사기간 : 2016. 3. 1.～12. 31.

○ 세부 추진계획

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
정비목표 (㎞)	75	14.5	6.5	10.8	6.9	7.6	11.9	7.2	9.6
사 업 비 (백만원)	60,000	11,608	5,232	8,665	5,558	6,049	9,482	5,722	7,684

※ 감리비 1,994백만원, 시설부대비 6백만원 제외

□ 추진실적

○ 정비실적 : 75㎞

○ 총사업비 : 62,000백만원

○ 세부 추진실적

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목 표 (㎞)	75.0	14.5	6.5	10.8	6.9	7.6	11.9	7.2	9.6
실 적 (㎞)	75.2	14.5	6.6	10.8	6.9	7.6	11.9	7.2	9.7
정비율(%)	100.3	100	101.5	100	100	100	100	100	101

□ 향후 정비계획

구 분		정비대상	2017년	2018년	2019년	2020년
합 계	연장(㎞)	310	89	68	68	85
	사업비(억원)	3,641	949	841	841	1,010
배급수관	연장(㎞)	246	71	50	50	75
	사업비(억원)	2,187	574	461	461	691
송배수관	연장(㎞)	64	18	18	18	10
	사업비(억원)	1,454	375	380	380	319

□ 행정사항

○ 각종 보고자료 및 통계자료 활용

○ 수도사업소 경영실적 평가에 반영. 끝.