등록번호	교통행정과-7965		주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설국장
등록일자	2017.2.3.
			이이용		박태서		고영자		전결 02/03 이우룡
결재일자	2017.2.3.
공개구분	대시민공개
			협조
『2017년 국가 안전대진단 관련』 어린이 보호구역 일제점검 및 정비계획
안전건설국 (교통행정과)

『2017년 국가 안전대진단 관련』 어린이 보호구역 일제점검 및 정비계획

○ 2017년 국가안전대진단과 관련임.

○ 우리구 관내 어린이보호구역의 교통안전시설에 대한 일제점검 실시하여     사전 위험요소 적출 및 정비로 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 도로교통법 제12조(어린이・노인보호구역 지정 및 관리)

❍ 2017년 국가안전대진단 추진계획(안전치수과-2305  2017.2.2.)

Ⅱ		주요현황

❍ 어린이보호구역 지정현황                             (단위:개소)

계	초등학교	어린이집	유치원	비 고
31	11	13	7

❍ 시설물 현황                                        (단위:개소)

계	통합안전표지	안전표지	과속방지턱	노면표시
1,484	372	236	186	690

Ⅲ		세부추진계획

□ 점검계획

❍ 기   간 : 2017.2. 20 ~ 3. 12 (20일간)

❍ 대    상 : 31개소 (초등학교 11, 어린이집 13, 유치원 7)

❍ 점검방법 : 현장출장 육안 현장조사

❍ 점검내용 : 노후 및 파손 등으로 기능이 불량한 시설물

❍ 점검반 편성 : 17명

- 구    청 : 4명 (교통행정과)

- 경 찰 청 : 3명 (서울중부경찰서,남대문경찰서)

- 민간단체 : 10명 (녹색어머니회)

❍ 주요 점검사항

- 보호구역내 시설물 설치 및 관리 상태 적정여부

- 교통안전시설물 추가 설치 및 개선사항 여부 등

※ 시설물 안전점검 결과표 참조 (붙임-2)

□ 정비계획

❍ 기   간 : 2017. 3. 13 ~ 3. 31 (19일간)

❍ 점검결과

- 경미한 사항은 즉시 시정 조치

- 안전표지, 과속방지턱, 노면표시 등 노후 및 파손시설물은 우리구

연간단가 업체 활용 긴급 정비

- 파손 및 훼손 정도가 심하여 소요예산이 많이 드는 시설물은 선) 임시조치, 후) 사업예산 확보후 공사 시행

□ 점검일정

연번	학교명	위 치	점검일정	비 고
1	청구초등학교	신당동 330-2	2017. 2. 20 ~ 2017. 2. 21
	리라/숭의초등학교	예장동 6-57
	덕수초등학교	정동 1-76
	광희초등학교	신당동 254번지
2	충무초등학교	장충동2가 173-7	2017. 2. 22 ~ 2017. 2. 23
	봉래초등학교	만리동2가 2번지
	장충초등학교	신당동 386번지
	남산초등학교	남산동2가 2번지
3	흥인초등학교	신당동 292-66	2017. 2. 24 ~ 2017. 2. 27
	한성화교소학교	명동2가 83-8
	신당초등학교	신당5동 161번지
	회현어린이집	회현동1가 100-72
4	일신유치원	남창동 202번지	2017. 2. 28 ~ 2017. 3. 02
	신당어린이집	신당1동 304-720
	성심어린이집	신당동 432-24
	청구어린이집	신당동 333-177
5	신당5동어린이집	신당동 67-29	2017. 3. 03 ~ 2017. 3. 06
	동화나라어린이집	신당동 52-17
	서울직장어린이집	서소문동 5-1
	황학어린이집	황학동 1457번지
6	약수어린이집	신당3동 366-19	2017. 3. 07
	약수교회어린이집	신당3동 372-87
	한솔어린이집	신당3동 844번지
	남산숲어린이집	신당3동 366-480
7	가명유치원	중림동 149-2	2017. 3. 08
	근화유치원	신당2동 406-4
	수암유치원	신당3동 844번지
	신일유치원	신당4동 347-298
8	약수유치원	신당4동 842번지	2017. 3. 09
	한일유치원	신당동 67-81
	단우물어린이집	다산로 48길 36

Ⅳ		행정사항

❍ 어린이보호구역내 주요시설물 일제점검 협조 요청 (경찰서 및 녹색어머니회)

❍ 국가안전대진단 추진계획 및 실적 제출 (안전치수과)

- 자체 세부추진계획서 제출 : 2017. 2. 10(금)

- 추진사항 중간보고서 제출 : 2017. 2. 22(수)

- 최종 결과보고서 제출     : 2017. 3. 29(수)

붙임 : 어린이보호구역 안전점검 결과표 1부.  끝.