문서번호	시설보수과-393
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	02/02 정흥순
협 조

2017년 난지수계 차집관로 준설 시행계획

2017. 2.

난지물재생센터

(시설보수과)

2017년 난지수계 차집관로 준설 시행계획

□ 난지수계 차집관로의 원활한 하수소통을 위한 퇴적물을 적기에 준설하여 환경보호 및 차집관로 유지관리에 만전을 기하고자 함

1. 추진근거

- 2017년 공통분야 유지관리 시설비 시행계획【시설보수과-286(2016.1.24)호】

2. 공사개요

가. 공 사 명 : 2017년 난지수계 차집관로 준설공사(연간단가계약)

나. 사 업 비 : 480백만원(준설토 처리 용역비 별도)

다. 사업기간 : 2017. 3 ~ 2017. 12

라. 공사내용 : 차집관거 준설(V=1,500㎥)

마. 예산과목 : 물재생센터 운영, 물재생센터 운영, 공통분야 유지보수,              시설비

바. 차집관로 현황

위 치	관로연장 (m)	맨홀 (개소)	청소용 투입구 (개소)	환기구 (개소)	우수토실 (개소)	비 고
계	93,299	906	8	28	254
한강	20,368	272	0	11	37
지천	72,931	634	8	17	217

3. 차집관로 준설 단가산정 및 공법선정

가. 단가산정  : 차집관로 준설이 가능한 특허공법 3가지에 대한 준설             견적을 받아 최저단가를 적용

나. 공법선정

- 수입물품 및 특정제품 선정위원회에서 특허공법 적정성 심의    의결된 결과에 의거 기술(특허) 사용협약 체결된 공법 적용

- 특허공법 적용 사유 : 우리센터의 차집관로는 암거 형태로 맨홀을   통하여만 준설이 가능한 구조로 유수의 흐름을 차단하지 않고   준설이 가능한 특허공법 선정 필요

※ 4개 센터 공통 적용 공법

⓵하수관로 퇴적토 준설공법 및 준설장치(특허제10********호),

⓶ 수중로보트 준설기를 이용한 차집관거 준설공법(특허제10********호),

⓷ 와이드가이드 이송기를 이용한 차집관거 준설공법(특허제10********호)

다. 특정제품 선정위원회 개최

- 객관적이고 투명한 공법선정을 위해 관리과장, 운영과장 및 운영과   기술직 6급 2명(김지응, 장인환) 참여

- 검토대상 공법(유수의 흐름을 차단하지 않고 준설이 가능한 공법)

4. 발주방법

가. 입찰방법 : 제한경쟁입찰

나. 입찰참가조건(안)

가) 건설산업기본법 시행령 별표1에서 정한 상하수도 설비공사업    면허 소지자중 서울시에 주된 사업소가 있는 업체

나) 하수관로 퇴적토 준설공법 및 준설장치(특허제10********호), 수중로보트 준설기를 이용한 차집관거 준설공법(특허제10********호), 와이드가이드 이송기를 이용한 차집관거 준설공법(특허제10********호)을 적용하였으므로 낙찰예정자는 상기 특허공법중 2개 이상의 특허개발자와 기술협약을 체결하고 적격심사 서류제출시 협약서를 제출하여야 함.

5. 향후계획

- 2017. 2월 : 공사설계 및 특정공법(특허) 심의위원회 개최

- 2017. 2월 : 공사발주(서울시 재무과 계약의뢰)

- 2017. 3월 : 공사 착공

- 2017. 12월 : 공사준공

첨부 : 특허증 사본 각 1부. 끝.