문서번호	생태공원과-471
결재일자	2017.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	02/02 문길동
협 조
	총무과장			박병현
	기획예산과장			김건태

한강 불투수포장 개선 기본 및 실시설계용역

준공기한 연장 검토(2차)

한강사업본부

(생태공원과)

한강 불투수포장 개선 기본 및 실시설계용역

준공기한 연장 검토(2차)

우리본부에서 추진 중인 ｢한강 불투수포장 개선 기본 및 실시설계용역｣과 관련하여, 용역 최종보고와 소규모환경영향평가 및 하천점용허가 협의 등의 사유로 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

용역개요

○  용 역 명 : 한강 불투수포장 개선 기본 및 실시설계용역

○  위    치 : 여의도, 이촌, 잠실, 반포 한강공원내 주차장

○  설계내용 : 불투수주차장의 저영향개발(LID)기법 활용하여 효율적 비점오염물질 저감 및 우수유출량 지연·저감 등 물순환 회복(주차장 10개소)

○ 용역기간 : 2016. 5. 16 ~ 2017. 2. 3

○ 용 역 비 : 164,000천원

○ 용역기관 : 주식회사 유신

준공기한 연장

○ 용역기간 : 25일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비 고
당 초	2016. 5. 16. ~ 2017. 2. 3.	변동없음
변 경	2016. 5. 16. ~ 2017. 2. 28.

○ 연장사유

- 설계용역(안) 최종보고회 개최하여 자문내용 검토 반영과 과업기간 연장 조정 의견 수용

- 소규모환경영향평가 및 하천점용허가 신청에 따른 협의기간 소요

귀책소재 및 지체상금 부과

○ 귀책소재 : 한강사업본부

○ 지체상금 : 미부과

검토의견

○ 한강시민위원회 소위원회(생태·환경분과)의 자문의견을 검토 반영한 설계(안)에 대하여 최총보고회 자문을 위해 과업기간 연장 조정 필요하고,

○ 서울지방국토관리청 하천점용허가 및 소규모환경영향평가 신청에 따른 업무협의, 내용보완 등의 기간이 필요한 바,

○ 상기와 같이 기본 및 실시설계용역 준공기한을 연장하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.  끝.