문서번호	소방행정과-1701
결재일자	2017.2.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김현태	천완주	윤봉수	02/06 장현태
협 조

- 안전도시 기반 구축을 위한 -

수궁119안전센터 등 3곳 내진성능평가 계획

2017. 2.

구로소방서

(소방행정과)

	- 안전도시 기반 구축을 위한 - 수궁·독산·공단119안전센터 내진성능평가 기본계획

최근 국내외 지진발생으로 건축물의 안전도에 우려가 있어 공공 건축물 지진방재대책에 따라 각종 재난·재해 상황관리를 위한 수궁·독산·공단119안전센터에 대한 내진성능보강을 위한 건축물성능평가를 추진하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 지진안전성 표시제 업무처리지침(국민안전처 2015.10.30.)

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조의2 제1항(내진성능평가 등)

❍ 서울시장 방침 제163호(2016.6.15.) 「서울시 지진방재 종합계획」

❍ 본부소방행정과-2201(2017.1.23.)호「소방청사 공공건축물 내진성능평가 계획」

Ⅱ		추 진 배 경

❍ 내진설계 반영 이전 신축되어 내진성능 평가 필요

❍ 내진 건축물에 해당하는 주요시설물 내진성능 평가 필요

❍ 내진 설계가 미비된 내진 설계 적용대상 공공시설물 우선적 시행

❍ 내진성능 미 확보된 청사에 대한 내진성능평가 우선 실시

Ⅲ		기 본 방 향

❍ 설계도서 검토 및 안전진단 결과를 참조하여 대상 건물 내력산정

❍ 건축구조기준(KBC코드)의 지진하중에 근거하여 설계된 지진하중 산정

❍ 추가조사 : 내진성능 설계 및 내진보강 방안 제시(정밀 내진해석)

Ⅳ		내진성능확보 현황

□ 청사별 현황

구분	구로 소방서	수궁	고척	구로	독산	시흥	신도림	공단
동수	2	1	1	1	1	1	1	1
내진성능 확보여부	확보	미확보	확보	확보	미확보	확보	미확보	미확보

※ 신도림119안전센터 : 2016년 내진성능평가 완료 (내진보강필요)

Ⅴ		추 진 계 획

□ 사 업 명 : 수궁·독산·공단119안전센터 내진성능평가(안전진단)

□ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 5월

□ 사업대상 : 3개소

부 서 명	위 치	건 물 개 요		준공년월일
		건물 규모	연면적(㎡)
수궁119안전센터	구로구 오리로 1285	철근콘크리트조 3/1층	837.50	1997. 3. 11.
독산119안전센터	금천구 시흥대로 386	철근콘크리트조 3/1층	732.00	2001. 11. 8.
공단119안전센터	구로구 디지털로 34길 45	철근콘크리트조 3/1층	886.70	2004. 11. 22.

□ 내진성능평가 과업내용

❍ 자료수집 및 내진성능평가 계획수립

❍ 설계도면 및 관련자료 분석

❍ 현황조사 및 관련자료 분석

❍ 자료정리 및 분석

❍ 건축물에 적합한 내진성능 평가기법 선정

❍ 구조해석 및 내진성능 평가

❍ 내진성능 향상을 위한 보수·보강방안 수립

❍ 최종보고서 작성 및 성과품 제출

□ 추진절차

□ 소요예산 : 금23,650천원

❍ 예산과목 : 직무환경개선 / 소방관서 시설물 유지보수 / 시설비(214-401-01)

Ⅵ		계 약 추 진

□ 계약방법 : 나라장터 전자공개수의계약

□ 지역제한(서울시), 업종제한 (『시설물의 안전관리에 관한 특별법』제9조에

따른『안전진단 전문기관』등록을 필한 기관)

Ⅶ		추 진 일 정

□ 기본계획 수립 : 2017. 2. 6. ~ 2. 7.

□ 타당성심사의뢰 : 2017. 2. 8. ~ 2. 13.

□ 입찰공고 : 2017. 2. 14. ~ 2. 22.

□ 용역계약 : 2017. 2. 23. ~ 2. 28.

□ 용역착수 및 완수 : 2017. 3월 ~ 5월(계약일로부터 60일)

□ 용역준공검사 : 2017. 5월.

붙임  1. 지진안전성표시제업무처리지침 1부.

2. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부.

2. 소방청사 내진성능평가 결과보고서식 1부.

3. 공공시설물 내진보강 추진현황 서식 1부.  끝.