문서번호	시설보수과-2105
결재일자	2014.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김발현		정재현	03/25 이승진
협조

현안사항 검토보고

(북악터널내부 보수보강공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

북부도로사업소

(시설보수과)

- 북악터널 내부 보수·보강 공사-

현안사항 검토 보고

금년도에 시행예정인 북악터널 내부 보수·보강공사 추진에 따른 발주방법 등 현안사항을 검토하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

사업현황

○ 시설현황 : 북악터널 (성북구 정릉동 ~ 종로구 평창동)

- 연장 : 810m, 쌍굴 왕복4차로, 준공 (구-'71년, 신-'91년)

○ 공사기간 : 2014. 04. ~ 2015. 12. (착공 후 21개월)

○ 공사내용

- 신·구 터널의 표면보수(내오염방지), 단면보수 및 내측 배수로 재설치,

라이닝 구간 조인트보수 및 아스팔트 표층개량, 기타 부대공 1식

○ 총사업비 : 5,100백만원 (‘14년 확보예산 1,290백만원)

계	기투자	‘14년	‘15년	비 고
5,100백만원	1,800	1,290	2,010

추진현황

○  2012. 03. 05(23:00) : 구터널 내벽 타일층 전도사고 발생

○ 2012. 03 ~ 04 : 외부전문가 현장점검 및 긴급 정밀점검 실시

(점검결과 : 구터널 82%, 신터널 40% 타일들뜸 상태)

○ 2012. 04. : 구터널 내부 타일층 전면 철거

○ 2013. 03 ~ 04 : 북악터널 보수·보강공사 자체 실시설계

○ 2013. 06 ~ 07 : 계약심사 (총차-51억) 및 공사발주 (1차-18억)

○ 2013. 03 ~ 09 : 2013년 정밀점검용역 시행

(점검결과 : 신터널 60% 타일들뜸 상태 진행)

○ 2013. 12. 21 ~ 22 : 신터널 내부 타일층 전면철거

○ 2014. 02. 28 : 북악터널 보수·보강공사 공사준공 (1차)

현안사항 검토

○ 현황 및 문제점

- 본 사업은 ‘13. 3월에 자체 실시설계를 완료하여 계약심사(‘13.6.13, 총차-51억)를        필하고, ’14년 2월 1차 준공(18억)된 사업으로,

- 향후 북악터널내부 보수·보강에 소요되는 사업비는 3,300백만원이나,

‘14년에 확보된 예산은 1,290백만원으로 금년도 공사 마무리가 어려운 실정임.

- 단위공사로 예산에 맞춰 일부만 공사시행 할 경우 공사구간 및 공종의 분리 등 품질확보가 곤란하고, 3년간(2013~2015년) 시공업체가 달라 시공한계로 인한 향후 하자범위 등이 불분명하며,  또한 부대공(교통처리비 등), 제경비의 중복으로 추가비용 발생으로 인한 예산낭비가 많음.

- ‘13년 정밀점검 용역실시 결과 신터널 내벽 타일이 60%이상 들뜸상태로 조사

되어 ‘13년 12월 21일~22일(2일간)에 긴급 철거한 상태로,

- 철거로 인한 도시미관 저해 뿐 아니라 안전사고의 예방 및 구조물의 안전성을

확보하기 위한 보수·보강이 시급한 상황임.

○ 대 책

- 예산절감 및 하자발생 시 분명한 처리를 위하여 신·구터널 보수·보강에 필요한 사업비 3,300백만원으로 총괄 발주하여 년차적(차수계약)으로 사업추진

○ 발주방법 검토

- 공사발주 방법 : 장기계속공사 사업추진 (차수계약)            [단위 : 백만원]

구 분	총 괄		금 회 (1차)		장 래 (2차)
	총공사비	공사기간	‘14 예산	공사기간	‘15 예산	공사기간
예산/공기	3,300	‘14. 04 ~ ’15. 12. (21개월)	1,290	‘14.04 ~ ’15.02. (11개월)	2,010	‘15.03~ ’15.12. (10개월)
공사내역	∘표면보수(천정) 13,219㎡ ∘표면보수(벽체) 6,350㎡ ∘단면보수(벽체) 665㎡ ∘아스콘표층개량 161@ ∘배수로정비 811m ∘부대공 1식		∘표면보수(구-벽체) 3,325㎡ ∘표면보수(신-벽체) 1,622㎡ ∘단면보수(벽체) 219㎡ ∘배수로정비 811m ∘부대공 1식		∘표면보수(신-천정) 13,219㎡ ∘표면보수(신-벽체) 1,403㎡ ∘단면보수(벽체) 446㎡ ∘아스콘표층개량 161@ ∘부대공 1식

※ 장래 2차는 예산 미확보 시 1차 물량만 처리하고 타절 준공토록 계약서에 명기

향후 추진계획

○ 2014. 03. 20 : 공사발주 사전검토 및 예산 재배정 요청

○ 2014. 03. 30 : 사전검토 보완 및 공사발주

○ 2014. 04.    : 교통소통대책 협의 (서울시 교통운영과)

○ 2014. 04.    : 공사계약 및 착공

첨부문서   1. 북악터널 위치도 및 현황사진 1부

2. 설계도서 1부.(따로붙임)  끝.