문서번호	건축부-2125
결재일자	2017.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김찬유		유현수	02/07 김진용
협 조

재사용플라자 건립공사

공사관계자(시공사, 감리자) 간담회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2.

도시기반시설본부

(건  축  부)

『재사용플라자 건립공사』

공사관계자(시공사, 감리자) 간담회 개최결과 보고

『재사용플라자 건립공사 공사』관련, 4차수 공사완료(준공기한 : ‘17. 3.15한)를 위하여 공사관계자(시공사, 감리자) 간담회 개최 결과를 보고 드림.

1		사업개요

위    치 : 성동구 용답동 250-1외 4필지

규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,529.57㎡

공사기간 : 2015. 1.15. ~ 2017.03.15.(26개월)

- 4차 공사 : ‘17. 1. 15 ~ ’17. 3. 15

시 공 사 : 동원건설산업(주)(현장대리인 원장재), ㈜서우건영

건설사업관리자 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 외 1

도 급 비 : 19,202백만원

- 4차 공사금액 : 3,041,620천원

2		공사관계자 간담회 개최

일  시 : 2017. 2. 6(월) 14:00 ~ 14:40

장 소 : 도기본 13층 건축부 회의실

참석자

- 건 축 부  :  유현수 과장, 담당 주무관 김찬유

- ㈜펨코엔지니어링 : 김수호 소장, 조영렬 사장

- 시 공 사 : 동원건설산업(주) 김영현 사장, 김소환 상무

주요 논의내용 : 4차 공사완료(‘17. 3.15)를 위한 시공사 및 건설사업관리용역업체 역할 등

3		주요 논의내용

4차수 공사완료를 위하여 시공사, 건설사업관리용역사의 본사 차원의 적극적인 본사       관심과 인력 지원이 필요하다고 판단됨(건축부)

동원건설산업(주) : 준공기한(‘17. 3.15)내 공사완료를 위하여 본사 차원에서 인력          충원 등 적극 지원하겠음

펨코엔지니어링 : 준공기한까지 건설사업관리지원기술자인 김수호 소장이 매일 현장에

출근하여 공정관리 등 공사완료에 차질 없도록 건설사업관리업무 수행하겠음

준공기한내 공사완료(청소완료 포함)하여 주시기 바라며, 공기연장은 없으며 준공       기한내 공사완료하지 않을 경우 지체상금 부과등 행정처분을 받지 않도록 공정관리를       철저히 하여 주시기 바람(건축부)

4		행정사항

준공기한내 공사완료를 위하여 매주 1회 합동공정회의 개최 추진

펨코엔지니어링에 준공시까지 건설사업관리지원기술자(건축, 토목, 조경) 합동으로

매주 1회 공사내역서와 건축, 토목, 조경공사 현황(사인몰 포함)을 현장 조사하여 발주처에 제출토록 통보.  끝.