문서번호	급수운영과-2163
결재일자	2017.2.7.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	한호진	02/07 전명수
협 조

위치변경으로 인한 급수공사비 추가고지(삼전동 1)

1. 건    명 : 급수공사비 추가고지(수전분리)

2. 현    황

가. 주    소 : 송파구 삼전동 1번지

**************

다. 공사개요 : 음식점 개점을 위한 25mm 수전분리

3. 보고내용

○ 상기 건물 1층 음식점(파리그라장) 개점을 위해 수전분리를 신청하여 기존건물 인입 50mm에서 정자분기하여 25mm 보호통 설치하고자 급수공사비 부과하였으나

○ 수요가에서 옆 건물과 공사협의가 되지 않아 건물뒤 상수도관 100mm에서 분기하여 보호통 설치토록 변경요청하여 추가공사비를 부과하고 공사를 시행코자 함

○ 공사개요 : 당초 수전분리 D=25mm L=1m → 변경 D=25mm L=5m

구 분	수요가 부담금(원)			비 고
	계	공 사 비	원인자부담금
당 초	2,759,000	1,286,000	1,473,000
변 경	3,682,000	2,209,000	1,473,000
증·감	증 923,000	증 923,000	-

4. 조치의견

○ 상기와 같은 사유로 추가 급수공사비 고지서를 발급토록 요금과에 요청코자 하며

○ 수요가로부터 추가 공사비 수납후 급수공사를 시행코자 합니다.  끝.