문서번호	시설보수과-778
결재일자	2017.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장		물순환안전국장
최승룡	윤승범	이인근		02/08 권기욱
협 조
	물재생시설과장		이철해
	물재생기전팀장		황철호
	물재생운영팀장		정훈모
	물재생시설팀장		이웅희
	운영과장		정종기

『제1처리장 시설현대화사업』

시설물 인수 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.02.

중랑물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『제1처리장 시설현대화사업』

시설물 인수 계획보고

우리센터내에 시행중인 『제1처리장 시설현대화사업』이 완료되어 감에 따라 향후 원활한 하수처리를 위한 시설현대화사업 시설물 인수계획에 대한 보고임.

1		시설개요

: 현 공정 96%

□ 시설규모 : 시설현대화 25만톤/일, 생물여과공법

□ 사업기간 : ‘09.02.~’17.04.(사업비 3,442억원)

□ 시 공 자 : 지에스건설(주)외 2개사[감리사 ㈜한국종합기술외 1개사]

□ 주요시설 : 초기우수처리(50만톤/일), 하수도과학관(2,842㎡)

2		추진경위

□ ‘09.02.13 : 제1처리장 시설현대화사업 착공

□ ‘15.02.04 : 시설현대화사업 시설물 인계·인수 전 T/F팀 운영

□ ‘16.07.07 : 시설현대화사업 하수처리공법 관련 현장견학(양벌, 옥정 하수처리장)

□ ‘16.08.24 : 하수처리공법 설명 및 종합시운전 사전 보고회 개최

□ ‘17.01.20 : 시설현대화사업 시운전 설명회 개최

□ ‘17.01.23 : 하수처리공법 관련 자문회의 개최

3		추진방향

□ 필요시 인수 과정에서 외부전문가 자문 및 합동 점검추진

□ 설계도서와 시공 상태 충분히 확인 점검 후 인수

□ 인수 및 민간위탁 차질 없도록 향후 일정관리 철저

4		인수팀 구성 및 운영

□ 구    성 : 7개분야 31명(세부현황 붙임)

- 물재생시설과 7명, 센터 13명, 감리사 5명, 시공사 6명

※ 물재생시설과 업무담당자는 입회

□ 운영기간 : ‘17.02월부터 인수 완료 시까지

5		향후계획

□ ‘17.02. : 종합 시운전(25만톤/일) 및 설계도서, 시공상태 현장확인

□ ‘17.03. : 종합 시운전 종료 및 외부 전문가 합동점검

□ ‘17.04. : 미진사항 보완 및 시설물 인수 준비

붙임 : 1. 인수 시설물 목록 1부.

2. 인수 업무별 담당자 1부.    끝.