문서번호	행정지원과-3270
결재일자	2017.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
김점철	서경란	이만기	02/08 홍현구

『청사증축 정보통신공사』

준 공 검 사

2017.  2. 7 .

동부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『동부수도사업소 청사증축 』

정보통신공사 준공검사

우리 사업소에서 시행중인『동부수도사업소 청사증축 정보통신공사』의 준공검사 하고자 함

□ 관련근거

❍ 행정지원과-2299(2017.1.26.)호 준공 검사 의뢰서

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 동부수도사업소 청사증축 정보통신공사

❍ 위    치 : 성동구 고산자로10길 13(행당동142-1)

❍ 공사규모 : 지상 3층, 연면적 473.93㎡

❍ 계 약 일 : 2016. 5. 18

❍ 착 공 일 : 2016. 5. 19

❍ 준공기한 : 2017. 1. 31

❍ 준 공 일 : 2017. 1. 26

❍ 계 약 자 : **************

❍ 계약금액 : 금38,777,720원(금삼천팔백칠십칠만칠천칠백이십원)

□ 준공검사

❍ 검사기간 : 2017. 1. 26 ~ 2. 7.

❍ 검 사 자 : 행정지원과 김점철, 정호남

❍ 검사항목 : 계약금액,보험료정산,공사시공상태,관련도서납품등

❍ 검사세부 사항 및 검사결과

검사항목	검사결과	조치사항	비고
보험료정산 확인	정산확인	국민, 연금, 건강보험 정산
안전관리비 정산 확인	정산확인
준공도면 납품확인	납품완료	도면5부
준공내역 납품확인	납품완료	내역서5부
공사공정사진 납품확인	납품완료	공정사진2부 및 CD1부
공사일보 주요기자재공급원승인신청서 검측요청서 자재검수요청서	납품완료	각2부
구내전송선로공사	검사완료	이상없음	사용전검사완료 1/24성동구청
방송설비공사	검사완료	이상없음
강당AV설비공사	검사완료	이상없음
CCTV설비공사	검사완료	이상없음

□ 담당자 의견

❍ 위와 같이 구내 전송선로 및 설비공사(방송설비,강당AV,CCTV설비등)설치 및 작동상태 이상 없으며, 준공도면 및 내역이 계약과 같이 공사 완료 되었기에 정보통신 공사에 대하여 준공처리 하고자 함.

□ 향후계획

❍ 공사대금 지급

❍ 기타 준공검사후 이상 발생시 하자조치

붙 임 : 1. 준공검사 의뢰서 1부.

2. 준공사진 1부(별첨).

3. 준공내역서 1부(별첨).

4. 준공도면1부(별첨).

5. 준공관련서류 각1부.

6. 준공검사 체크리스트1부.

7. 준공검사조서1부.  끝.