문서번호	급수운영과-2288
결재일자	2017.2.8.
공개여부	부분공개(5,6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백창진	임인택	02/08 전명수
협 조

급수공사 연기 및 재작업지시 보고

명에 의거 마천동외 14개동 상수도공사 담당업무 수행중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 공사 현황

○ 공 사 명 : 2016년 마천동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 계약기간 : 2016. 6. 21. ~ 2017. 6. 30.

○ 계약금액 : 금5535,947,560원

○ 계약상대자 : **************

○ 급수공사 기한 연기 내역

지시번호	공사위치	공사개요	기존공사기간	변경공사기간	연기사유
신설-186	**********	급수관 신설	2016.12.22. ~ 2016.12.30.	~ 2017.2.22.	수요가 요청 신축공사현장 지연
신설-206	*********		2017.1.27. ~ 2017.2.10.	~ 2017.2.22.
신설-211	********		2017.2.3. ~ 2017.2.14.	~ 2017.2.22.

2. 지체상금 부과여부 : 급수공사 수요가 요청으로 인한 급수공사 연기건이므로 지체상금 미부과하고자 함.

3. 조치내용

- 상기와 같이 신축현장사정으로 급수공사 작업지시기간을 연기해야 할 사항이었으나,    「2016년 마천동 외 14개동 상수도공사」의 계약금액이 모두 소진되어 본 작업지시     건은 취소하고자 하며,

- 신규 계약된 「2017년 마천동 외 14개동 상수도공사(단가계약)」 ***********    에게 재작업지시하여 급수공사 업무에 만전을 기하고자 합니다.  끝.