문서번호	역사문화재과-2544
결재일자	2017.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
소장	시문화재관리팀장	역사문화재과장
황정로	진태호	02/09 정상훈

남산골한옥마을

관람환경 개선사업 시행 계획

2017. 2

문  화  본  부

(역사문화재과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

남산골한옥마을 관람환경개선사업 시행 계획

남산골한옥마을 전통정원 관람환경 개선사업을 실시하여 관람객들께

쾌적한 휴식 공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		현 황

□  위    치 : 중구 퇴계로 34길 28

□  규    모 : 79,937㎡(전통정원 72,003㎡, 전통가옥 7,934㎡)

□  주요시설

□ 전통가옥 5동(시 민속자료 4, 기타 1), 남산국악당, 관리사무소

□ 서울천년타임캡슐, 천우각, 정자 4 (망북루, 청류정 등)

□ 연못(2) 및 계류, 화장실 2동, 종합안내판 2개 등

Ⅱ		추진 현황

□  남산골한옥마을 전통정원 환경개선공사

□ 사업범위

- 충정사와 연결되는 녹지 및 산책로 조성과 휴게시설 확충

- 정문 주변 녹지대 공간을 활용하여 쉼터확보후 의자, 탁자 등 설치

- 퇴색된 포토존의 형태를 입체포트존으로 개선 등

□ 사업기간 : 2017. 2. ∼ 7

□ 소요예산 : 162,410천원(시설비150,000천원, 도면작성용역12,410천원)

- 예산과목 : 역사문화유산의 계승발전, 문화재 보존복원, 전통문화시설            운영, 남산골 한옥마을및전통정원운영, 시설비(공사비)

: 건설공사 설계수준 향상, 건설기술향상교육 및 우수건설             관계자시상, 기술용역자체설계를 위한 설계도면 작성지원,            시설비(재배정, 설계도면작성 용역)

□  한옥마을 출입구 개방

□  개소 : 4개소

- 24시간 개방완료:2개소(충정사옆 출입구, 필동마을마당 엘리베이터)

- 01:00 ~05:00 폐쇄 : 2개소(정문, 후문)

※ 남산골한옥마을 전통정원 관람환경개선계획[역사문화재과-122

(2016.8.22.)]에 의거  2017년 3월 CCTV 설치(17대) 완료후    타당성 등 검토하여 개방예정

Ⅲ		발주 계획

□  설계도면 작성 용역

□ 사업명 : 한옥마을 정문주변 환경개선공사 설계도면 작성 용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 30일

□ 발주방법 : 수의계약

□ 계약방법 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제1항제5호에 의거 소액(2천만원 이하)이므로 관공서 설계용역 경험이 많고 최저견적을 제출한 조경설계엔지니어링 업체와 수의계약

□ 소요예산 : 12,410천원

□  환경개선공사

□ 사업명 : 남산골한옥마을 정문주변 환경개선공사

□ 용역기간 : 착수일로부터 60일

□ 발주방법 : 공개경쟁입찰(제한)

□ 참가자격 : 주된 사업소가 서울특별시에 소재한 건설산업기본법 등에            따라 공사를 시행할 수 있는자

□ 소요예산 : 150,000천원

Ⅳ		추진 계획

□ 2017. 2~3 : 설계도면작성 용역 시행

□ 2017. 4~7 : 공사 입찰 및 공사착수, 공사준공예정