“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰 요청(2016년 도심보행길 조성사업 용역 계약금액 변경)

1. 보행정책과- 1357호(2017.2.3.) 관련입니다.

2. 우리 부서에서 발주한「2016년 도심보행길 조성사업 용역」의 계약금액을 아래와 같이 변경하고자 하오니 처리해 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 2016년 도심보행길 조성사업 용역

2) 용역기간 : 2016.9.22. ~ 2017.3.31.

3) 용역업체 : ㈜매스씨앤지

4) 계약금액 : 161,500,000(금일억육천일백오십만원)

나. 변경내용 : 계약금액

계약금액 변경	당 초	금161,500,000원 (금일억육천일백오십만원)
	변경후	금242,250,000원 (금이억사천이백이십오만원)

※ 계약기간은 변경없음

다. 계약금액 변경 사유

- ‘서울로 7017’ 및 ‘종로’ 보행특구를 과업 범위에 포함하는 등 과업범위 확대에 따른 추가 금액 소요

따로 붙임 : 1. 2016년 도심보행길 조성사업 용역 계약 변경 계획 1부

2. 변경내역서 1부

3. 합의 각서 1부.  끝.

	보행정책과장
주무관	이동주		보행정책팀장	김현중		보행정책과장	02/03 이방일
협조자
시행	보행정책과-1369	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02-2133-2413	/전송	02-2133-1052	/	outernet@seoul.go.kr	/	대시민공개