투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	한국건설기술관리협회장 귀하
(경유)
제목	건설기술용역 계약변경 통보

「건설기술 진흥법 시행령」 제45조제1항제1호에 따라 건설기술용역 현황을 아래와 같이 통보합니다.

1. 용역 현황
① 용역종류 및 범위	［ ］계획ㆍ조사ㆍ설계		［ ］타당성조사 ［ ］기본계획 ［ ］기본설계 ［ ］실시설계 ［ ］설계의 경제성등 검토
	［√］건설사업관리		［ ］설계 전 단계 ［ ］기본설계 단계 ［ ］실시설계 단계 (□ 의무, □ 임의) ［ ］구매조달 단계 ［∨］시공 단계［ 감독 권한대행 등 건설사업관리 (의무, □ 임의, 전체, □ 부분)］ ［ ］시공 후 단계
	［ ］기타		［ ］감리 ( □ 공동주택, □ 다중이용건축물) ［ ］시험ㆍ평가 ［ ］품질관리 ［ ］안전점검ㆍ진단 ［ ］기타( )
용역명	신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사 전면책임감리용역														② 공종	하수도
사업위치	서울특별시 강서구 ~ 양천구 일원						③ 사업규모			빗물저류배수시설(터널 D=10.0m,L=3.6km 유입수로(터널 D=5.5m,L=1.1km) 수직구 6개소(유입3, 환기1, 유출1, 유지관리1) CSOs유입시설 목동빗물펌프장 공사 1식
④ 계약자	주 계약자: (주)수성엔지니어링 (대표자 박미례)														지분율	36.9%
	공동계약자: (주)천일 (대표자 김석환)														지분율	27.7%
	공동계약자: (주)동일기술공사 (대표자 김수보)														지분율	27.7%
	공동계약자: (주)범한엔지니어링종합건축사무소 (대표자 최창희)														지분율	7.7%
입찰방식	［ ］기술ㆍ가격분리입찰방식 ［ ］지명경쟁입찰방식 ［√］제한경쟁입찰방식 ［ ］공개경쟁입찰방식 ［ ］수의계약 ［ ］기타( )
선정방식	［ ］PQ평가방식 ［ ］기술자평가방식 ［ √ ］기술제안서평가방식 ［ ］기타( )
계약형태	［ ］원도급/단독계약 ［ √ ］원도급/공동계약 ［ ］기타														낙찰률	74.75%
계약방식	［ ］총액계약 ［ √ ］장기계속계약 ［ ］계속비
대가산출	［ ］공사비요율방식 ［ √ ］실비정액가산방식 ［ ］기 타
⑤ 계약 및 이행내용	구분	계(백만원)		(주)수성 엔지니어링		(주)천일		(주)동일 기술공사			(주)범한엔지니어링종합건축사무소			계약 또는 이행기간			비고
	전 체	5,041		1,862		1,397		1,396			386			‘13.01.07. ~ ’17.02.22.
	기성분	2,904		1,151		881		862			10			‘13.01.07. ~ ’16.12.31.
	금차 계약분	1,809		610		457		457			285			‘17.01.01. ~ ’17.12.31.
	향후 잔여분	328												‘18.01.01. ~ ’18.02.22.
2. 공사개요(시공 단계 건설사업관리 및 감리 용역에 한하여 작성)
⑥ 총공사비	115,951 백만원(관급자재비 등 7,564백만원 포함)								공사기간				2013.05.27. ~ 2018.01.22.
계약금액	108,387 백만원(낙찰률 : 일괄입찰)								시 공 자				현대건설(주) (대표자 정수현)
3. 계약변경내용
변경구분	변경일자				변경 전							변경 후
계약금액	2016.12.26.				3,861,000,000							5,041,000,000
계약기간	2016.12.26.				2017.02.22.							2018.02.22.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	송영배		치수시설과장	조성만		방재시설부장	02/03 남궁용
협조자	주무관	이병환
시행	방재시설부-1883	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8775	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개