문서번호	설비부-1833
결재일자	2017.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		여인웅	02/06 권오식
협조

『서울역 7017 프로젝트 통신공사』

설계변경(1차2회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 02.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서울역 7017 프로젝트 통신공사』

설계변경(1차2회) 검토보고

우리 본부에서 시행하는 「서울역 7017 프로젝트 통신공사」 시행중 공사추진에 따른 내역변경 내용에 대한 검토 결과를 보고 드림.

1		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 서울역 7017 프로젝트 통신공사

□ 위    치 : 중구 남대문로5가(퇴계로) ~ 만리동1가(만리재길)

□ 공사규모 : 비상벨 33대, WIFI 27대, CCTV 29대, 방송설비 1식 등

□ 사업기간 : 총차 ′16.05.12.~′17.06.11.(1차 ′16.05.12.~′17.02.11.)

□ 계약금액 : 총차 402,797천원(1차 200,000천원)

□ 계약업체 : 이비인프라㈜

2		관련근거

□  1차 내역변경 요청(서울역 7017 프로젝트 통신공사).(‘17.02.03)

3		설계변경 내용

□ 1차 도급공사 계약금액 변경 현황

구 분		당 초	변 경	증감액
1차	계약금액	200,000,000	200,000,000	변경없음
	공사기간	2016.05.12. ~ 2017.02.11		변경없음

※ 공사 추진에 따른 내역 변경

□ 내역변경 세부 내용

품 명(규격)	변경전	변경후	금 액	비고
전력케이블(0.6/1KV)F-CV	-	+590m	+3,723,490원
제어케이블(CVV-SB, 2C4㎟)	-	-425m	-2,868,032원
STP케이블(옥외), Cat6 4p	-	+750m	+2,301,750원
F/O 케이블 8C	-	+670m	+2,800,600원
터파기(기계80%, 인력20%)	-	2.7㎥	+12,260원
되메우기(기계80%, 인력20%)	-	2.7㎥	+7,165원
케이블트레이	-	75m	+3,607,425원
케이블트레이 지지대	332m	0m	-7,277,108원
집계오류부분 삭제	-	-	-2,307,550원
합 계			0원

□ 건설사업관리기술자 검토 의견

○ 상기와 같이 시공사에서 제출한 내역변경(1차2회)에 대한 검토 결과 설계 변경함이 타당하다고 판단 함.

4		보고자 의견

○ 공사 추진중 발생한 내역 변경사항을 검토한 결과 건설사업관리기술자의 검토의견이 적합한 것으로 판단되어 재무과에 설계변경(1차2회)을 의뢰하고자 함.

따로붙임 : 1. 감리원 설계변경 보고 1부. 끝.