문서번호	도로시설과-1574
결재일자	2017.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	터널복개팀장	도로시설과장
김창환	김두석	02/06 김길남

예산 재배정 검토 보고

- 녹천지하차도 보수 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 1.

안전총괄본부

도로시설과

「녹천지하차도 보수」예산 재배정 검토 보고

2017년 도로시설물 유지관리사업「녹천지하차도 보수」추진을 위한 도로사업소 예산 재배정 검토 보고

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 2015년 정밀점검 용역 시행 및 결과보고(2015. 12.)

- 정밀점검결과 발생한 1순위 보수보강 대상 적기조치로 시설물 안전확보

○ 교통소통대책 수립용역 추진계획(북부도로사업소 시설보수과-756, 2017.01.24)

- 녹천지하차도 도로점용공사에 따른 교통소통 대책 수립용역 추진

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 녹천지하차도 보수

○ 위    치 : 도봉구 창동 산 163-6

○ 예 산 액 : 800,000천원

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

○ 주요내용 : 강성포장 4,513㎡, 신축이음 보수 279m 등

	《 녹천지하차도 》
◇ 위 치 : 도봉구 창동 산 163-6 ◇ 규 모 : 연장 307m, 면적 6,416㎡ ◇ 종별/상태등급/준공일/구조형식 : 2종 / B / ‘93.09. / RA

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 금회 재배정 요청

○ 공사 추진을 위한 교통소통대책 수립 용역비 : 11백만원

- 기술용역타당성심사 완료 : 2017. 01. 31.

- 북부도로사업소 재배정 요청 : 2017. 02. 02.

※ 북부도로사업소 시설보수과-971(2017.02.02.)

□ 재배정 검토

○ 요청 사업 추진의 필요성 : 필요

- 2015년 정밀점검 용역결과 1순위 보수보강 대상(강성포장)

- 교통통제를 요하는 공정으로 시행전 교통송통대책 수립 용역 필요

○ 요청 사업비의 적정성 : 적정

- 기술용역타당성심사 결과에 따라 적정 대가 적용

○ 예산 재배정(안)                                    (단위 : 천원)

예산과목	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	산 출 내 역
시설비	800,000	0	11,000	789,000	- 교통소통대책 수립 용역비 : 11,000천원

Ⅲ		추진계획

□ 추진일정

○ 2017. 02. : 교통소통대책 수립 용역비 예산 재배정

○ 2017. 02. ~ 2017. 04. : 공사 설계 및 계약심사

○ 2017. 05. : 공사발주

○ 2017. 06. ~ 2017. 12. : 착공 및 공사 시행

붙   임 : 위치도 및 사진 1부.

별   첨 : 도로사업소 요청서류 일체(기술용역타당섬심사결과 포함).    끝.

□ 위치도 및 사진

도면 설명		녹천지하차도 위치도
사진설명	녹천지하차도 전경