“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	(주)쿠키혼
(경유)
제목	마곡산업단지 법정기한 내 미착공에 따른 시정명령 및 입주계약 해지 예고

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마곡산업단지 산업시설용지 공사착수와 관련하여 “착공기한 내 착공 촉구 및 착공계획 제출 요청”(서남권사업과-514,2017.1.13.)공문으로 귀 기업이 입주계약한 필지에 대한 착공기한(2017.2.4.)도래 및 개발기한 등(2015.2.5.일부터 2년이내 착공하여 5년 이내 완공)을 통보한 바 있습니다.

3. 우리시에서 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제42조에 따라 귀 사에 개발기한 준수 의무를 이행하여 주실 것을 요청하였음에도 현재까지 착공이 이루어지지 않아  시정명령을 하오니 2017.8.7.(월)까지 착공신고를 완료해 주시기 바랍니다.

4. 또한 정해진 기한 내 시정명령 사항을 이행하지 않을 경우 관련 법령에 따라 입주계약해지 절차를 이행할 예정이오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	한지혜		입주지원팀장	이소영		서남권사업과장	전결 02/07 이병수
협조자
시행	서남권사업과-1349	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 4층	/
전화	2133-1526	/전송	2133-1015	/	hanjh15@seoul.go.kr	/	대시민공개