문서번호	방재시설부-2098
결재일자	2017.2.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
조양연		장수철	02/08 남궁용
협조
	주무관		김소연

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역』

총괄12회 및 8차2회 설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2. 7.

도시기반시설본부

(방재시설부)

『서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역』

총괄12회 및 8차2회 설계변경 검토 보고

「서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역」수행중에 감리단으로부터 제출된 설계변경 총괄12회 및 8차2회에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 용  역  명 : 서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 전면책임감리용역

❍ 위    치 : 서울시 강서구 마곡동 91번지(서남물재생센터내)

❍ 사업개요 : 고도처리시설개량 127만톤/일, 시설현대화 36만톤/일

❍ 용역기간 : 2009. 11. 30 ∼ 2017. 05. 31

❍ 시 공 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

❍ 도 급 비 : 11,446백만원

보고 내용

❍ 관련근거

∙ 설비부-17438호(2016.11.10) 상주건설사업기술자(기계분야)투입 승인 알림

∙ 설비부-19623호(2016.12.14.) 업무지시(마곡지구내 재생수 공급시설 보조감리원 투입승인)

❍ 설계변경 사유

∙ 총괄 12회 변경은 9차감리용역 발주를 위해 총괄공사계약기간(준공예정일 2018.02.28.)에 맞춰 총괄 감리용역기간을 2018.02.28.로 연장 설계

∙ 8차 감리용역 수행중 보조감리원(기계분야) 투입승인에 따른 투입일 조정

∙ 8차 감리용역에 포함된 마곡 감리용역의 준공기일과 서남 감리용역 준공기일이 서로 상이하여 금차 계약금액내에서 준공일을 2017.02.21.로 통합 조정 시행

❍ 총괄12회 및 8차2회 설계 변경

구 분		당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
총괄 12회	전체	11,446,300천원 (`09.11.30∼`17.05.31)	11,446,300천원 (`09.11.30∼`18.02.28)	변경없음 (증273일)
8차 2회	전체	1,317,000천원 (`16.02.06∼`17.04.30)	1,317,000천원 (`16.02.06∼`17.02.21)	변경없음 (감53일)	투입 기간 조정
	서남	1,176,000천원 (`16.02.06∼`17.01.26)	1,264,000천원 (`16.02.06∼`17.02.21)	증87,300천원 (증26일)
	마곡	140,300천원 (`16.11.01∼`17.04.15)	53,000천원 (`16.11.01∼`17.02.21)	감87,300천원 (감53일)

조치 의견

❍ 총괄12회 변경은 9차용역 발주를 위해 계약금액 변동없이 용역준공일을 공사 준공기일에 맞춰 2018.02.28.로 준공기한 연기 변경계약

❍ 8차 2회 변경은 상주보조감리원 투입기간을 조정하고 계약 금액 변경없이서남, 마곡준공기일을 2017.02.21. 로 조정 설계변경 시행

❍ 서남, 마곡 준공기일을 2017.02.21. 로 조정함에 따라 감액된 마곡 감리용역비 87,300천원은 서남 감리용역 9차용역 발주 내역에 포함하여 2017.4.15.까지 마곡 감리용역을 수행코자 함.

붙임 : 1) 책임감리원 검토 의견서 1부.

2) 설계변경(총괄12회 및 8차2회) 내역서 1부.  끝.