투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	도급공사 및 관급자재 납품기한연기 의뢰(장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 기계공사)

우리 부에서 시행중인『장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 공사』관련 도급공사 기한 연장 및 관급자재 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 기계공사

나. 계약현황 및 납품기한 연기요청 내용

(조달수수료 포함금액임)

납품요구번호/ 계약번호	공 사 명	계약금액	계약업체	계약일자	공사(납품)기한
					당 초	변 경
	기계공사	87,784,000	㈜케이이씨암코	‘16.11.01.	′17.06.30	‘17.08.10
12-16-2-57635-00 / 00156146900	엘리베이터 구매	53,510,300	㈜금영제너럴	‘16.11.24	‘17.06.30	‘17.08.10
12-16-2-48127-00 / 00168160100	냉난방기 구매	70,331,850	엘지전자(주)	‘16.10.11	‘17.06.30	‘17.08.10
12-16-2-48132-00 / 00168140700	전열교환기 구매	24,921,270		‘16.10.11	‘17.06.30	‘17.08.10
12-16-2-57722-00 / 00168140700	전열교환기구매(추가)	167,470		‘16.11.24	‘17.06.30	‘17.08.10

다. 연기사유 : 건축공사 선행공정 연장에 따른 설치시기 미도래

라. 계약금액 및 수량 : 변경없음

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 관련공문 및 합의각서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	이강욱		건축설비과장	김은덕		설비부장	02/09 권오식
협조자
시행	설비부-2020	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8629	/전송	02-3708-8659	/	24326@seoul.go.kr	/	대시민공개