투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울지하철9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역(4차)변경 계약의뢰

1. 도시철도토목부-3339호(2014.03.24)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 지하철 921공구 건설공사 전면책임감리용역(4차) 설계변경사항에 대하여 아래와 같이 변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울지하철9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역(4차)

나. 계 약 자 : ㈜ 유신   대표 박찬식

다. 용역개요 : 지하철9호선3단계 921공구 건설공사 전면책임감리(토목)

라. 변경사유 : 보조감리원 1인 추가투입 비용 증가로 당초 계약 감리원수                                감 조정에 따른 과업수행기간 단축

마. 용역기간

0. 총      괄 : 2009.11.18 ~ 2016.02.28

0. 금      회   - 당 초 :  2013.03.09 ~ 2014.04.30

- 변 경 :  2013.03.09 ~ 2014.04.01.

바. 계약금액

0. 총      괄 : 5,613,550,000원

0. 기  시  행 : 1,325,000,000원

0. 금      회 :  655,000,000원(변경 없음)

0. 장      래 : 3,633,550,000원

사. 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업,

도시철도9호선3단계건설, 시설비및부대비, 감리비.

붙임 :  1. 설계변경 시행 방침서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	정성환		토목3과장	김상우		도시철도토목부장	03/25 이은상
협조자
시행	도시철도토목부-3386	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로231(예장동 산5-85)남산별관4층 서울시기반시설본부 도시철도국 토목부	/
전화	02-772-7235	/전송	02-772-7306	/	sunghawan@seoul.go.kr	/	대시민공개